문서번호	설비부-1020
결재일자	2020.1.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	01/21 代여인웅

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재 납품기한 연기검토 보고

2020. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재 납품기한 연기검토 보고

당 공사 현장의 선행공정 미완료로 관급자재(엘리베이터) 납품을 당초 계약기간 내 완료할 수 없어 납기를 연장하고자 함

※ 납기변경 : ´20.01.28. →´20.10.07.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사

○ 위    치 : 서울시 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상3층, 연면적 3669.62㎡, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : ´19.04.08.~´20.10.07.(1차 ´20.02.28.)

○ 공 사 비 : *******************

○ 도 급 사 : 덕신건업㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

2		관련근거

○ 건설사업관리단 납품기한연기 검토보고, 동일감리 제20-028호(´20.01.21.)

3		계약현황

○ 건    명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사_엘리베이터 구매설치

품명	납품요구번호	계약자	금액(원)	납품기한
*****	****************	**********	***********	***********

4		검토내용

□ 납품기한 연기내용

○ 납품기한 변경내역

납품요구번호	변 경 내 역			비고
	구분	변경 전	변경 후
****************	**	***********	***********	****
	****	***********	***********

○ 납품기한 연기사유

− 현재 건축 골조공사가 완료되지 않은 상태이며 조기 납품에 따른 현장 보관 및 관리문제 발생이 예상되어 납품기한 연장이 불가피함

□ 연장검토 특이사항

○ 엘리베이터 MAS 계약기간 종료

− 엘리베이터 MAS 계약기간 종료로 조달청 시스템상 추가적인 납품기한 연기가 불가함

○ 조치계획

− 업체와 자체 합의하에 납품기한을 연장하고자 하며, 납기 내에 납품 완료시 지체상금은 부과하지 않음

□ 관련근거 : 조달청 승강기 MAS 계약 납기 연장 관련 안내 공문,

조달청 쇼핑몰구매과-11684(2019.10.02.)

□ 주요내용 : 시스템상의 납기일을 지나 납품이 완료되더라도 업체의 귀책사유가 아닌 경우 지체일수 조정(0으로 입력) 가능

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 선행공정인 건축공정이 완료되지 않아 상기와 같이 납품기한 연장 이 타당함

5		조치의견

○ 건설사업관리단 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 업체와 자체 합의하에 납기를 연장하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토보고(합의각서 포함) 1부