문서번호	공공디자인과-9748
결재일자	2014.7.25.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
★전문관	도시빛정책팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
협 조

한양도성 경관조명 개선사업 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
한양도성 경관조명개선 기본계획 및 실시설계 용역준공(‘14.2.25)				추정공사비: 6,210백만원

2014. 7.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

한양도성 경관조명 개선사업 추진계획 보고

한양도성(삼선지구 등 8개지구 등)에 기 설치된 경관조명의 노후 및 유네스코 세계문화유산 등재를 위한 정비개선 실시설계 용역이 완료되었기에 이에 따른 연차별 경관조명 개선사업을 추진 하고자 함

１		사업개요

현 황

❍ 위 치 : 한양도성(성북지구 등 8개 지구 등 8,557m)

지 구	구 간	설치연장 [m]	시 설 현 황[면,KVA]			준공일
			분전함	등 수	부하전력
8개 지구		8,557	28	2,232	351
성북지구	숙정문 ～ 혜화문	1,080	4	350	89	‘05.12.30
삼선지구	혜화문(동소문)좌․우측	979	3	304	46	‘09.10.30
동숭지구	혜화문우측～흥인지문	1,051	5	300	34	‘08.01.30
광희지구	광희문 남측(광희문)	129	1	40	8	‘06.06.30
장충지구	장충체육관～남산동측	1,053	3	256	45	‘08.12.30
남산지구	남산동측 ～ 남산서측	1,296	5	326	50	‘08.01.30
청운지구	돈의문북측～창의문	825	2	189	31	‘08.12.30
삼청지구	창의문 ～ 숙정문	2,144	5	467	48	‘08.12.30

※ 청운지구내(신규) : 인왕산구간 825m 경관조명 설치(도시기반시설본부)

□ 현실태 및 문제점

❍ 경관조명 설치 후 약 6년 경과로 시설노후 및 부점등 지속 증가

❍ 주변 광원과의 부조화 및 색온도 불일치로 본연 컨셉 훼손

❍ 산책로 이용자에 의한 시설물 손괴 및 적기보수 지연으로 관리부실 심화

매입등 등기구 돌출 전경	누전 등 선로고장으로 구간부점등 전경

주변광원과의 부조화로 경관조명 훼손	투광 등기구 루바 파손

추진근거

❍「한양도성 보존, 관리 종합계획」(시장방침 제193호, ‘12.6.5)

- 유네스코 세계문화유산 등재를 위한 사전조치

❍ 한양도성 경관조명 관리방안 개선(공공디자인과-5099호, ‘12.4.20)

추진경과

❍ ‘13.04.08 :『한양도성 경관조명 시설개선』계획 및 설계 용역 수립 방침

❍ ‘13.05.02 : 인왕산 경관조명 시공방안 행정2부시장 보고

❍ ‘14.02.25 : 실시설계용역 준공(남산지구 등 8개지구)

❍ ‘14.03.20 : 한양도성 경관조명개선(인왕산구간) 추진계획 방침

2		사업추진계획

추진방향 : 연차별 개선

❍ 우선순위 결정기준 : 지구별 조명의 노후 진행 상태와 관광성, 역사성, 조망점 등을 고려하여 경관조명개선 순위를 선정

❍ 1단계(2015년) : 삼선지구, 남산지구

- 삼선지구 : 도성 주변이 공원화된 지역으로 관광객의 방문빈도가 높은 낙산공원

- 남산지구 : 국내·외 관광객이 즐겨찾는 공원으로 조망성이 우수한 지구

❍ 2단계(2016년) : 동숭지구, 청운지구

- 동숭지구 : 산책로가 형성된 지역으로 관광성과 조망성이 우수

- 청운지구 : 도성 내․ 외측으로 형성된 산책로의 이용률이 높음

❍ 3단계(2017년) : 장충지구, 삼청지구

- 장충지구 : 주거지역과 인접한 구간으로 관광성이 낮은 지역

- 삼청지구 : 군사지역에 포함된 구간으로 야간이용객 제한지역

❍ 4단계(2018년) : 성북지구, 광희지구

- 성북지구 : 도로 및 시민들의 쉼터에서의 조망점 우수

- 광희지구 : 2013년 조명기구 개선 지구

년차별 소요예산 현황

구 분	설치 구간	용역현황	공사비(추정)/단위:원
2015년	삼선지구 (혜화문~낙산공원정상	실시설계	1,249,960,000
	남산지구 (남산동측~남산서측)	실시설계	1,085,060,000
2016년	동숭지구 (낙산공원정상~흥인지문)	실시설계	414,150,000
	청운지구 (돈의문북측~창의문)	실시설계	524,760,000
2017년	삼청지구 (창의문~숙정문)	실시설계	1,472,480,000
	장충지구 (장충체육관~남산동측)	실시설계	770,360,000
2018년	성북지구 (와룡공원~성북쉼터)	실시설계	540,080,000
	광희지구 (광희문 남측(광희문))	실시설계	154,010,000
총공사비			6,210,860,000

행정사항

❍ 한양도성 경관조명 예산확보 및 사업추진, 유지관리

- 년차별 사업계획수립 및 예산편성 : 문화관광디자인본부(예산담당관 협조)

- 사업시행 : 도시기반시설본부(설비부)

- 유지관리 : 종로구(공원녹지과), 성북구(토목과), 중구(공원녹지과),

중부공원녹지사업소(시설과)

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부

2. 한양도성 8개지구 경관조명개선 실시설계(설명서) 1부.

3. 한양도성관리개선방안 방침서 1부. 끝.