						★ ◎
문서번호		노원도봉센터-723				부 원					부원				노원도봉센터장				동북자산처장
보존기간		1년																	전결			01/21
						신장하					지민수				조대원				김용섭
결재일자		2020.01.21
공개여부		부분공개(5)				협조
일상감사		대상아님
통제	없음
	신성욱
공릉2-6외 3개단지 인터폰설비 교체공사
준공정산 보고
				서울주택도시공사
(동북자산처 노원도봉센터)

준 공 정 산 보 고

우리센터에서 시행한 “공릉2-6외 3개단지 인터폰설비 교체공사”에 대하여 법정경비 실비정산 및 기타 제잡비의 감액조정 등 으로 인하여 아래와 같이 준공시 정산을 하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

〇준공정산 관련근거

정산대상	관련근거	비고
산업안전 보건관리비	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2019-64호)제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.
퇴직공제부금비	건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령(대통령령 제29972호. 2019.7.9.) 제9조(공제부금 납부확인서의 제출 등)의 ②항
실비정산, 보험료의 사후정산 등	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제90호,시행 2019.10.04.) 제1장.입찰 및 계약집행기준 제7절.실비산정, 8절.보험료 사후정산 등

계약명	계약자	계약금액(원)	계약일	착공일	비고
				준공일
공릉2-6외 3개단지 인터폰설비 교체공사	세원전설(주)	436,959,635	2019.10.17	2019.10.17
				2020.01.14

Ⅱ		계약현황

Ⅲ		준공정산사유

〇 법정경비 실비정산 및 기타 제잡비 정산

〇 미시공세대 정산(누계기성94.79% 외 5.21% 정산)

Ⅳ		준공(정산)내역

〇 준공(정산)금액

계약금액 (A)	준공금액 (B=C+D)	전회기성 (C)	금회기성 (D)	정산금액 (E=A-B)	예산과목
436,959,635	414,210,000	270,000,000	144,210,000	감)22,749,635	택지 : 임대.임대.수선.아파트 재개발 : 대행,임대,수선유지교체비

〇 준공(정산)세부내역

구분		계약금액 (A)	준공금액 (B=C+D)	전회기성 (C)	금회(준공) 기성(D)	정산금액 (E=A-B)	비고
재료비계		234,197,027	228,865,494	154,373,261	74,492,233	-5,331,533	미시공 정산
노무비(직접+간접)계		97,205,411	94,778,320	60,773,284	34,005,036	-2,427,021	미시공 정산
경비	산재보험료	3,645,201	3,554,185	2,278,997	1,275,188	-91,016	실비정산
	산업안전보건 관리비	6,949,790	2,500,000	0	2,500,000	-4,449,790	실비정산
	고용보험료	845,685	824,569	528,727	295,842	-21,116	실비정산
	국민건강보험료	3,160,926	1,170,860	0	1,170,860	-1,990,066	실비정산
	노인장기요양 보험료	268,995	99,600	0	99,600	-169,395	실비정산
	국민연금보험료	4,403,767	1,618,650	0	1,618,650	-2,785,117	실비정산
	퇴직공제부금비	2,070,114	940,000	0	940,000	-1,130,114	실비정산
	기타경비	18,558,535	18,124,050	12,048,205	6,075,845	-434,485	실비정산
	경비소계	39,903,013	28,831,914	14,855,929	13,975,985	-11,071,099	경비소계
순공사비		371,305,451	352,475,728	230,002,474	122,473,254	-18,829,723	순공사비 소계
일반관리비		17,451,335	16,566,355	10,810,114	5,756,241	-885,000	제잡비율 정산
이윤		8,479,227	7,585,558	4,614,959	2,943,599	-893,669	제잡비율 정산
공급가액(합계)		397,236,033	376,554,547	245,454,547	131,100,000	-20,681,486	합계 분
부가가치세		39,723,602	37,655,453	24,545,453	13,110,000	-2,068,149
총도급공사비		436,959,635	414,210,000	270,000,000	144,210,000	-22,749,635	총합계 분

Ⅴ		행정사항

〇 상기 정산내역에 따라 정산하여 준공처리하고자 함

〇 준공검사(예정)일 : 2020.01.21.~01.28.

〇 준공검사자의 지정

-관련근거 : 건설공사 집행규정 시행내규(2018.08.23.)제34조(검사자의 임명)

2.시설물 보수ㆍ보완공사 및 기타

나.준공검사

4)도급액 1억원 이상 : 담당부장 1명과 3급 또는 4급 1명

〇 준공검사 완료 후 준공검사조서 작성 및 제출(계약부).

붙임  1. 준공내역(수정)_200120 1부

2. 정산합의서 1부

3. 인터폰설치현황200108 1부

4. 안전관리비(19년10월)191031 1부

5. 안전관리비(19년11월) 191130 1부

6. 안전관리비(19년12월) 191230 1부

7. 안전관리비(20년01월) 200114 1부.  끝.