투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(팬코일유닛) 변경 계약 의뢰(G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사)

우리 본부에서 추진중인「G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사」에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

납품요구번호	계약건명	계약금액	계약자	납품기한		비 고
				당초	변경
****************	팬코일유닛(FCU) 구매	***********	*******	`20.02.08	`20.12.31	계약금액 변경없음

나. 연기사유 : 현장 설치시기 미도래

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1.납품기한 연기 보고서 1부.

2.합의서  1부.   끝.

	설비부장
주무관	조윤제		건축설비과장	김은덕		설비부장	01/22 임정규
협조자
시행	설비부-1051	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8631	/전송	02-3708-8659	/	ssingcho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)