				★ ◎
문서번호	토목조경설계부-201			부 원			토목조경설계부장				건축설계처장
보존기간	30년											01/22
				최유리안나			민주현				오석렬
결재일자	2020.01.22
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
「공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발 사업」소규모 지하안전영향평가 용역 시행(안) 보고
		서울주택도시공사
(건축설계처 토목조경설계부)

「공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발 사업」

소규모 지하안전영향평가 용역 시행계획(안) 보고

우리공사에서 추진 중인 「공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발 사업」과 관련, 지하안전관리에 관한 특별법 시행령 제23조에 의거 본 사업이 굴착깊이 10m이상 20m미만인 굴착공사를 수반하는 사업에 해당되는 바, 소규모 지하안전영향평가 용역을 시행코자 계획(안)을 다음과 같이 보고합니다.

1		관련근거

「지하안전관리에 관한 특별법」

〇 제23조(소규모 지하안전영향평가의 실시 등) 및 동법 시행령 제23조(소규모 지하안전영향평가 대상사업) 『굴착깊이가 10m이상 20m미만인 굴착공사를 수반하는 사업』

지하안전영향평가 시행요청[공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙복합개발사업](건축설계부-205호, 2020.01.17.)

2		용역목적

본 사업의 지반굴착으로 인해 지하안전에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 지반침하를 예방하거나 감소시킬 수 있는 방안을 마련코자 함.

3		용역개요

용 역 명 : 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 소규모 지하안전영향평가 용역

※ 지원시설용지(Ds13), 산업시설용지(D15)의 지하를 통합개발 예정인 바, 1개의 용역으로 발주

용역범위 : 지하안전영향평가 1식

용역기간 : 착수일로부터 6개월(소규모 지하안전영향평가 협의 완료시까지)

용역내용

〇 소규모 지하안전영향평가 실시 및 평가서 작성

〇 소규모 지하안전영향평가 승인 등을 위한 관계기관 협의 및 협의내용 반영 등 관련 절차 이행을 위한 제반 업무

〇 현장조사는 기존 설계용역의 지반조사 성과를 활용하거나 협의하여 시행하고, 추가로 수행하는 과업은 업무지침에 따라 추가 반영

소요예산(안) : 금 67,209천원 (부가세 및 손해배상보험료 포함)

〇 사 업 명 : 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업

※ 공공형 지식산업센터와 건설형 도전숙의 면적비율로 도급비 지출

〇 예산과목 : 주택.건축.설계.도급비

〇 산출내역 및 근거 : 붙임 “설계내역서” 참조

※ 서울시 기술용역 타당성 심사 결과에 따라 추후 계약금액 조정 예정

4		용역수행자 선정

관련규정

〇 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법), 제13조(낙찰자의 결정), 동법 시행령 제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등)

〇 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제89호, 2019.10.04.)

참가자격

〇 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 입찰 참가자격을 갖추고, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 아니한 자로서 다음 각 항의 요건을 갖추고 있어야 함.

- 「지하안전관리에 관한 특별법」 제25조의 규정에 의하여 지하안전영향평가 전문기관으로 등록을 필한 업체

- 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 서울특별시에 소재한 업체

〇 공동도급 불허

용역수행자 선정 방법

〇 최저가 낙찰자 선정

- 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

5		향후 추진일정(안)

〇 2020. 01. : 서울시 기술용역 타당성 심사 의뢰

〇 2020. 02. : 용역 발주 의뢰

※ 상기 일정은 진행상황에 따라 변경 가능

붙임  1. 과업내용서(공공형 지식산업센터, 건설형 도전숙) 1부

2. 설계내역서(공공형 지식산업센터, 건설형 도전숙) 1부.  끝.