2019년 서울시 보람일자리 사업

한지붕세대공감 코디네이터 업무 메뉴얼

2019. 12.

서울시50플러스 서부캠퍼스

Contents

0. 사업추진과정

1. 사업계획

2. 사업설명회 개최

3. 참여자 모집 및 선발

4. 참여자 교육

5. 참여자 활동 관리

6. 결과 보고

[붙임] 행정서류(총 6종) [ 참여자용 (4종) ] - 일모아시스템을 활용한 자격조회 동의서 , 참여자 단체상해보험가입 정보수집 , 활동서약서 , 자치모임 회의록 [ 사업 담당자용 (2종) ] - 관리자 보안 서약서 , ID권한요청서 , ID권한변경요청서 , ID권한폐기요청서 , 권한리스트

0		추진과정

주요내용		세부내용
수요조사 (활동처 모집)		① 서울시(주택정책과, 인생이모작지원과), 50+재단 ② 서울시 한지붕세대공감사업 활성화 지원
⇩
사업설명회		① 서울시50+포털에 사업 설명회 공지 및 사전신청(구글 설문지) 접수 ② 사업설명회 실시: 정확한 JOB 인지 후 신청토록 정보제공
⇩
참여자 모집 및 선발	2주 (활동시작 D-9주)	① 참가자 모집공고 - 서울시50+포털, 50+재단 및 캠퍼스 홈페이지 ② 참가자 지원서 접수 ③ 선발: 1차 서류전형(2배수이내), 2차 면접전형 - 활동내용 인지, 참여동기, 협동정신, 보행능력 능력 등 검토 ④ 중복조회: 일모아시스템 회원가입 후 타기관 공공일자리 및 고용보험 등 가입여부 확인(서울시 인생이모작에서 권한 승인) ※ (필수)면접 시 ‘일모아시스템을 활용한 자격조회 동의서’ 수령
⇩
참여자 교육	2주 (활동시작 D-8주)	① 교육 30시간 : 1일 6시간(10:00~17:00) - 인식전환 : 12시간 - 직무교육 : 18시간 - 재참여자의 경우는 법정교육 등 필수교육만 실시(2일) ② 수료기준: 출석률 90% 이상 ③ 교육결과보고 및 서울시50+포털→직무교육관리→교육이수 등록
⇩
참여자 활동관리	1주 (활동시작 D-1주)	① 수료자에 한해 활동참여 기회 제공 ② 활동조 편성(조당2~3명), 활동처 배치 및 상해보험 가입 - 월 57시간 이내 활동 ③ 활동물품 지원: 명함, 명찰, 포스터, 리플렛, 사무용품 등 ④ 현장 활동 점검 및 모니터링 : 수시 ⑤ 전체회의(월 1회, 2시간), 자치모임(월 1회, 2시간) ⑥ 보수교육: 연 2회
⇩
결과보고	활동 종료	① 사업결과보고 ② 참여자 만족도 조사 ③ 매칭가구(어르신/학생)모니터링 조사

1		사업계획

절차	일정	세부 업무내용	참고문서
기획회의 및 수요조사 (활동처모집)	2주 (활동시작 D-5주)	① 서울시 사업담당자(주택정책과)와 실무자 회의 ② 서울시 주택정책과에서 자치구 대상 수요조사 실시
		∙ 서울시 주택정책과 팀장, 주무관 ∙ 서울시50플러스 서부캠퍼스 일활동지원팀 팀장, PM, 전담인력
세부사업계획	2주 (활동시작 D-8주)	① 문서기안 - 일반기안문: 사업계획(안) 기안 및 상신(대표이사 결재) ※ 참조: 보람일자리사업 방침서, 첨부: 사업계획안	(서부)일활동지원팀 -483(사업계획안)

2		사업설명회 개최

절차	일정	세부 업무내용	참고문서
사업 설명회 개최	2주 (활동시작 D-8주)	① 사업설명회 계획 기안문 결재 ② 서울시50+포털에 사업 설명회 공지 ③ 사업설명회 실시 - 정확한 활동내용을 인지 하도록 정보제공	(서부)일활동지원팀 -514(설명회 개최)

3		참여자 모집 및 선발

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
모집공고	1주 (활동시작 D-3주)	① 문서기안 ※ 모든 문서기안 시 세부계획(안)을 참조문서로 첨부함 - 기안 시 협약서 및 보람일자리 전체사업계획 참조 또는 첨부 ② 모집 공고번호 발급요청 - 재단본부 경영지원실에 대내문서 발송하여 요청 - 경영지원실 공고번호 회신 문서 접수 후 공고문 게시 ③ 모집홍보 - 웹포스터 제작 (웹포스터 제작 매뉴얼 활용) - 서울시50+포털 (회원가입>모집공고관리>세부사업공고 등록) ※ 참여자 모집은 14일 내외 공고 ④ 일모아시스템 회원 가입 및 교육 수료(전담매니저)	2019년 (서부)일활동지원팀-541(공고번호 요청)

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
서류 및 면접 심사	2주 (활동시작 D-3주)	① 문서기안 - 서류 및 면접심사 시 심사 계획서 기안 및 상신 ※심사계획에는 심사기준, 점수표, 심사위원 이력·증빙 첨부 - 서류 및 면접 심사 결과 (본부장 전결) - 서류 및 면접 심사수당 기안(지출품의/결의) - 면접위원 참석협조 요청 발송 공문 ② 서류심사 - 심사위원 섭외(외부 3인 이내) - 심사위원들의 서류 채점표를 합산하여 배점 순으로 합격자 결정 ③ 서류 및 면접심사 준비 - 서류 심사위원이 면접심사도 병행 가능 - 강의실 예약: 서울시50플러스포털→대관 * 면접장소와 대기 장소 2곳 사전예약 - 참여자: 참여자 명단(서명 확인용), 명찰, 면접시간표, 면접 장소 안내지 및 면접참가 안내 문자발송 - 면접위원: 면접 심사 매뉴얼, 면접채점표 양식, 모집공고문 명패 준비 및 참석여부 재확인(메일 또는 유선) - 면접 심사 매뉴얼 양식: 면접(심사)요령, 면접(심사)지표/채점 기준 등 ④ 면접진행 - 안내지 부착: 면접장소와 대기 장소, 1층 정문, 엘리베이터옆 에 장소 안내지 부착 - 출석서명: 참여자 명단의 출석 서명은 정자 표기하도록 안내 대기시간 내 미도착 참여자에게 참가여부 재확인 - 면접위원은 면접 전(15~20분)에 모여 면접심사 매뉴얼 설명 과 예상 질문 논의 - 면접위원 수당지급조서와 면접(심사)위원 서약서 수령 (필수)면접 시 면접자에게 ‘일모아시스템을 활용한 자격 조회 동의서’ 수령	2019년 (서부)일활동지원팀-636 (선발심사계획) (서부)일활동지원팀-715 (면접계획)
합격자 발표	2주 (활동시작 D-3주)	① 서류 및 면접심사 합격자 발표 - (서류심사) 1.5~2배 이내 인원 선발 후 재단 및 캠퍼스 홈페이지에 서류 합격자 발표 및 면접 안내문 게시 - (면접심사)목표인원 선발 후 최종합격자 발표 및 교육안내 서울시50+포털 및 캠퍼스 홈페이지 게시(운영사업팀 협조) - 합격자 대상 합격 통지 및 참여자교육 안내 문자발송 ② 타 사업 중복 참여 확인: 50+포털, 일모아시스템 - 일모아시스템 회원가입 후 타기관 공공일자리 및 고용보험 등 가입여부 확인(서울시 인생이모작지원과에서 권한 승인) ③ 참여자 선정포기 등록 - 최종 합격 후 선정 포기자는 ‘선정포기’를 50+포털 ‘마이 페이지’에 등록	2019년 (서부)일활동지원팀-798(최종합격자발표)

4		참여자 교육

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
사전준비	4주 (활동시작 D-5주)	① 문서기안 ※ 지출품의는 3~5일전 결재 완료 - 교육계획(안)기안 ※ 방침서상의 교육내용 변동 시 적용 - 홍보용품(현수막, 배너)제작 지출품의 / 결의 - 참여자교육 교재제작 지출품의 / 결의 - 참여자교육 강의의뢰 협조요청 발송 공문 - 참여자교육 강사비 지출품의 - 참여자교육 다과구입 지출품의 / 결의 ② 강사섭외 - 교육 4주전에 섭외 완료. 교안은 교재제작을 위해 3주전 까지 요청 - 이력서, 경력증명서, 사업자등록증, 전문자격증 등 경력 증빙 자료 수령 - 공통교육의 경우 기존 강사풀 활용, 직무교육의 경우 전년 도 강사평가 결과 확인 후 강사풀 이용여부 결정 ③ 교재제작 - 교육커리큘럼 순서대로 목차 구성하여 파일 넘버링 후 업체 송부 및 확인 전화 - 반드시 지출품의(견적서첨부) 결재 완료 후 제작 주문 ④ 현수막/배너제작 - 개강 5일 전에 지출품의 후 제작 주문 ⑤ 기타 - 출석부, 명찰, 다과, - 강의실 사전 예약	2019년 (서부))일활동지원팀-798(교육계획) (서부))일활동지원팀-809(교재 제작) (서부))일활동지원팀-811(배너,현수막제작)
교육진행	1주 (활동시작 D-1주)	① 문서기안 ※ 지출결의는 최대 3일 이내 결재 완료 - 홍보용품(현수막, 배너)제작 지출결의 - 명함·명찰 제작 지출품의 ② 개강 시 준비물 - 현수막/ 배너 설치, 안내지 부착, 출석부, 교재, 다과 준비, 강사료 지급조서, 노트북(전자교탁 미설치 시), 빔 포인터, 강의평가서(회차별), 강사용 생수 등 ③ 교육 오리엔테이션 - 한지붕세대공감 코디네이터 교육안내(PPT 활용) ④ 매 교육 시 준비물 - 출석부(정자 표기), 강사지급조서, 강의평가서 ⑤ 제출서류 안내 - 교육기간 내 주민등록등본(서울시 거주 확인), 사업자등록증 (해당자), 관련 증빙자료(수료증, 자격증 등),사진(명찰)

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
교육진행	1주 (활동시작 D-1주)	⑥ 참여자 활동처 배정 - 서울시(주택정책과)에서 자치구 수요조사 후 서부캠퍼스 담당자 와 협의 후 배정 ⑦ 활동처 담당자 50+포털 권한 승인 - 경영지원팀 혹은 보람일자리사업단 포털 담당자에게 활동처 담당자 ID권한 신청서, 보안서약서, 권한리스트 송부 후 권한 승인 요청 ⑧ 상해보험 가입 - 참여자교육 수료자 명단을 (공통)엑셀양식에 따라 작성 하여 보람일자리 사업팀으로 송부 - ‘참여자 단체상해보험가입 정보수집 ’에 교육생 본인 서명 수령 후 서류는 캠퍼스 담당자가 보관 ⑨ 명찰, 명함 제작 - 참여자의 명찰(사진필요), 명함을 업체에 제작 의뢰 - 지출품의(견적/타사견적) 결재 완료 → 제작 의뢰 → 물품수령 후 지출결의 ⑩ 강의 평가서 작성 - 매 강의 과목마다 교육생들이 강의평가서 작성 - 교육결과 보고 시 강의 평가 결과 첨부	(서부))일활동지원팀-862(명함, 명찰 제작)
교육수료	1주 (활동시작 D-1주)	① 문서기안 - 참여자교육 수료자 교육실비 지급 지출품의/결의 - 참여자교육 강사비 지출결의 - 참가자교육 결과보고서 ② 수료자 포털 입력 - 포털에서 수료증 자동 발급을 위해 내역(참여자상태, 교육 참 여 일수, 참여 시간 )입력 후 승인 ③ 수료증 발급 - 50+포털(참여자 마이페이지)에서 자동 발급 ④ 활동안내 - 활동 전에 활동조 편성, 활동처, 전체회의 및 자치모임 운영, 보수교육 등에 대해 PPT 자료로 안내 - 활동처 배치현황 : 각 활동처(자치구)의 담당자, 연락처 등 - 별도의 활동처 배치 안내지를 적당한 장소에 부착하여 참여자가 직접 확인할 수 있도록 함 - 활동서약서는 본인 서명 후 수거 ⑤ 참여자 활동처 배치 및 50+포털 입력 - 서울시50+포털→활동처 배치(서울시 주택정책과 담당자와 매칭 후)→활동처 목록에 등록 ⑥ 교육실비 지급(수료 후 계좌입금) - 기안 시 참여자교육실비 지급내역(엑셀양식), 출석부, 참여자 통장사본 파일 첨부	(서부))일활동지원팀-598(강사료 지급) (서부))일활동지원팀-702 (교육결과 보고) (서부))일활동지원팀-977(교육실비 지급)

5		참여자 활동 관리

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
참여자 활동 관리	활동기간 (매월 진행)	① 문서기안 - 사업기간 내 전체 활동비 지급 품의(대표이사 결재완료) - 매월 활동비 지급 지출결의서 (활동비 지급내역 첨부) ② 활동개시 - 공지된 날로 부터 각 활동처에서 활동 개시 - 활동처 담당자 면담(각 자치구 담당자) ③ 참여자 활동 관리 ※ 월 40시간 이상, 57시간 이내 활동을 원칙으로 함 - 활동비는 월 525,020원(57시간 기준/시간당 9,211원) 지원 - 전체회의(2시간) 및 자치모임(2시간)은 활동시간으로 인정되나, 현장 활동으로 대체 불가하여 필히 참석토록 함 - 중식, 지각, 조퇴는 활동시간에서 제외되며, 활동은 가급적 1일 8시간 이내로 활동할 수 있도록 안내 - 참여자 활동을 서울시50+포털 내 활동관리를 통해 수시 확인 (활동일지 작성방법 점검 포함) - 필요 시 활동내역에 대한 확인 및 피드백 진행 - 활동일지는 50+포털에 3일 이내 입력토록 안내 - 토요일/공휴일은 가중치(1.5배 )미적용 - 활동사항은 반드시 밴드에 올리도록 하고 활동일지와 대조 확인 필요 ④ 중도포기자 상해보험 해지 - 중도포기자 발생 시 ‘활동중도포기 사유서’를 50+포털에서 승 인 후 ‘활동중단시작일’ 부터 상해보험 해지(보람일자리사업팀에 이메일로 전달하면 담당자가 일괄 처리)	(서부))일활동지원팀-1110(활동비 지급)
불성실 참여자 관리	활동기간	① 불성실 참여자 관리: 담당자 개별면담을 통해 탈락여부 결정 - 월 40시간미만 활동 지속 시 - 활동불성실자(무단 지각, 조퇴, 활동 중 음주, 활동지 이탈 등) - 전체회의와 자치모임 4회 이상 불참	업무지침서 참조
활동처 현장방문 및 관리	활동기간	① 문서기안 - 활동처 현장방문 다과 구입 지급 지출품의/결의 - 출장신청서 상신 및 복명서 등록(팀장님 전결) ② 활동 현장 방문 및 점검 - 방문 전 활동처 담당자와 방문일시 조율 - 활동처 담당자 및 활동자의 애로사항 청취 - 활동사례 발굴 및 관리 - 활동처 담당자의 사업내용 이해와 활동자와의 커뮤니케이션 파악	(서부)일활동지원팀 -1734(다과구입)

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
전체회의	매월 1회	① 문서기안(매월 적용) - 전체회의 다과비 지출품의/결의 - 전체회의 결과보고(본부장 전결) ② 전체회의 - 매월 마지막 주 특정요일을 정하여 1회 진행 * 회의 2시간으로 인정하며, 현장 활동으로는 대체 불가 - 활동자가 전원 참석할 수 있도록 사전 밴드에 공지 함 - 출석부는 반드시 본인 자필로 정자표기 - 권역별 활동사항을 서로 공유하도록 함 - 주요 공지사항을 안내 함 - 결과보고 시 전체회의 출석부,자치모임 회의록을 붙임문서로 첨부	(서부)일활동지원팀 -1138(전체회의 결과보고)
자치모임	매월 1회	① 자치모임 - 월 1회 전체회의 전후 참여자 주도로 활동그룹별 탄력적 운영 * 2시간으로 활동인정(회의) - 활동사례 및 애로사항 공유, 그룹별 협업 활동, 스터디 활동 등 자기성장의 기회 제공 - 활동처 담당자와 회의, 간담회, 교육시간, 워크숍으로 활용 가능 - 종료 후 반드시 회의록을 담당자에게 이메일 제출 담당자는 전체회의 결과 보고 시 붙임문서로 첨부
보수교육	연 2회	① 문서기안 - 보수교육 계획 품의서 결재(본부장) - 보수교육 강사비/ 다과비 지출품의/결의 - 보수교육 결과 보고(본부장 전결) ② 보수교육 진행 - 연 2회 실시 - 사전수요조사를 통해 사업 참여자에게 필요한 교육 실시 - 강사는 교육 한 달 전까지 섭외하며, 강의교안은 1주일 전까지 취합 후 교육당일 강의평가서와 인쇄하여 배포 - 강사료지급조서, 프로필(경력증명,자격증 등), 통장사본 수령 후 강사비 지급	2019년 (서부))일활동지원팀-1275(보수교육 실시)

6		결과보고

주요내용	소요기간	세부 업무내용	참고문서
결과 보고		① 매칭가구에 대한 모니터링 조사(서울시 주택정책과) - 어르신과 학생 대상 만족도 조사 실시 ② 사업 결과보고 - 사업종료 후 결과보고서 작성(본부장 전결) - 보람사업의 통일된 공통 양식으로 작성	2019년 (서부))일활동지원팀-2146(결과보고)

참여자용		[붙임1]

<앞면>서울시 50+보람일자리 사업

일모아시스템을 활용한 자격조회 동의서

성 명					주민등록번호	-
주 소					연락전화번호
이 메 일					수신동의여부	동의( ) 미동의( )
핸드폰번호					수신동의여부	동의( ) 미동의( )
타 일자리사업 참여제의 SMS 수신 동의 여부 * 일모아시스템의 다른 일자리사업에서 신청자 부족으로 참여자 선발이 어려운 경우 귀하의 연락처로 참여제의 문자 발송						동의( ) 미동의( )
과거 재정지원 일자리사업 참여여부 (최근참여 순)	참여 사업명		①	②			③
	참여기간		20 . . .∼20 . .	20 . . .∼20 . .			20 . . .∼20 . .
현재취업상태			① 취업 ② 실업 ③ 취업경험 없음	실 업 기 간		20 . . .∼20 . .

□ 본 신청서는 50+보람일자리사업 참여자 선정을 위한 기초 자료로서 참여자의 본인의 고용보험

가입여부 및 타 재정지원 일자리 사업 참여여부 조회 시 활용됩니다.

□ “개인정보보호법”에 따라 “개인정보 수집․이용․조회․제공 동의서”를 작성하여 주시기

바랍니다. (뒷면)

※ 귀하는 개인정보제공에 대하여 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 불이익(50+보람일자리 사업

참여자 선정 제한 등)이 있을 수 있습니다.

20  년   월    일    신청인  성명 :            (날인/서명)

<뒷면>

개인정보 수집·이용·제공 및 고유식별정보 처리에 관한 동의서

1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항

재정지원 일자리사업 참여 신청과 관련하여 「고용정책기본법」 제13조의2에 근거하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조에 따라 동의를 구합니다.

□ 개인정보의 수집·이용 목적 : 재정지원 일자리사업 참여자 선정 심사, 구직등록 여부, 계약 체결, 중앙부처·지방자치단체의 일자리관련시스템 등 정보제공 및 정책자료 활용(사업 관련 각종 연구∙설문조사 포함)

□ 수집·이용할 개인정보 항목 및 보유, 이용기간

구분	개인정보	보유∙이용기간
필수항목	(본인) 성명, 주민등록번호, 주소, 성별, 연락가능한 전화번호	동의일로부터 10년

2. 개인정보의 제공에 관한 사항

재정지원 일자리사업 참여 신청과 관련하여 「고용정책기본법」 제13조의2에 근거하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 제공하기 위하여 「개인정보보호법」 제17조 및 제18조에 따라 동의를 구합니다.

□ 개인정보를 제공받는 자 : 안전행정부, 보건복지부, 고용노동부, 여성가족부, 국가보훈처, 지방자치단체, 한국고용정보원, 건강보험공단, 국세청

□ 개인정보를 제공받는 자의 이용·제공 목적 : 건강보험부과금액, 가입자구분 및 증번호 등 건강보험정보 및 공적연금가입 정보, 가구재산, 고용보험가입 및 실업급여수급정보, 구직활동정보, 주민등록 등 관련자료 확인을 통한 재정지원 일자리사업 참여자 선정 및 참여자 참여비 지급, 취업지원

□ 제공할 개인정보 항목 : (본인) 성명, 주민등록번호, 참여기간, 월별 지급액, 계좌번호, 취업취약계층유형정보
(가구원) 주민등록번호, 참여자 정보

□ 제공받는 자의 개인정보의 보유, 이용기간: 제공일로부터 6개월(피제공기관의 법률에서 기간을 별도 명시한 경우 해당 법률에 따름)

3. 고유식별정보의 처리에 관한 사항

재정지원 일자리사업 참여 신청과 관련하여 「고용정책기본법」 제13조의2에 근거하여 아래와 같이 귀하의 고유식별정보를 처리하기 위하여 「개인정보보호법」 제24조에 따라 동의를 구합니다.

□ 고유식별정보의 수집·이용 목적 : 재정지원 일자리사업 신청자 본인 확인 및 자격증빙

□ 수집·이용할 고유식별정보 항목 : (본인) 주민등록번호 또는 외국인등록번호(외국인일 경우)

□ 고유식별정보의 보유∙이용기간 : (본인) 동의일로부터 10년

※ 귀하는 상기 1∼3번 사항에 대하여 각각 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 참여자가 직접 관계서류를 제출해야 하며, 부득이한 경우 참여자 선정이 제한될 수 있음을 알려 드립니다

※ 신청자 고유식별정보를 포함한 개인정보 수집∙이용∙제공 동의/미동의 자필 서명란
성명	수집∙이용	2. 제공	3. 고유식별정보처리	서명
	□동의 □미동의	□동의 □미동의	□동의 □미동의

20   년     월      일

서울시50+재단 대표이사  귀하

[붙임2]

2019 서울시 50+보람일자리 사업

참여자 단체상해보험 가입을 위한 정보수집

‣ 가입개요 : 2019 서울시50+보람일자리 참여자 단체상해보험

‣ 실시목적 : 사업 참여자의 활동안정성 확보 및 활동 중 상해로 인한 신체‧재산상의 손해를 보장하기 위함

‣ 보 험 사 : 한화손해보험(주)

‣ 가입내용 : 50+보람일자리 활동을 통해 발생하는 24시간 상해사망‧후유장해, 실손의료비 등을 보장범위 이내에서 담보

* 보험내용(안) : 24시간 상해사망‧후유장해 50,000천원, 일상생활배상책임담보10,000천원, 강력범죄발생금(일상생활형) 1,000천원, 실손의료비(상해입원 30,000천원, 상해통원_외래 250천원, 상해통원_처방조제 50천원), 화상치료 200천원, 골절치료(치아파절제외) 200천원

* 활동내용‧환경 등 다양한 사유에 따라 보장범위(담보구분, 보험가입금액 등)가 변경될 수 있음

‣ 유의사항 : 단,50+보람일자리 활동을 통해 발생한 경우에 한하여만 담보가능하며, 실손의료보험 보유자는 단체상해보험과 중복가입 시에도, 부담한 치료비 실제액을 초과하여 중복으로 보상받을 수 없음 (보험금 지급 시 비례보상)

1. 개인(신용)정보의 수집ㆍ이용에 관한 사항

서울시50플러스재단 및 당사 업무수탁자는 「개인정보보호법」,「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」및「다중이용업소의 안전관리 에 관한 특별법」에 따라 본 계약과 관련하여 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 수집ㆍ이용하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?

개인(신용)정보 수집․이용 동의	□

□ 개인(신용)정보의 수집ㆍ이용 목적

• 보험계약의 인수심사ㆍ체결ㆍ유지ㆍ관리(부활 및 갱신 포함), 적부 및 사고조사(보험사기 조사 포함), 보험금 등 지급심사 및 보험 계약, 보험금 청구에 이해관계가 있는 자에 대한 법규 및 계약상 의무이행

• 기존 계약자에 대한 보험계약 상담(당사 및 당사 설계사에 한함)

• 순보험요율의 산출ㆍ검증     • 보험모집질서의 유지 및 민원 처리 및 분쟁 대응

• 금융거래(보험료 및 보험금 등 출ㆍ수납을 위한 금융거래 신청, 자동이체 등 접수)관련 업무

□ 수집ㆍ이용할 개인(신용)정보의 내용

• 개인식별정보(성명,주민등록번호,외국인등록번호,운전면허정보(운전면허번호 포함),주소,직업(직장명,업종, 직무,근무 지역 포함)전화번호, 휴대전화번호, 전자우편주소), 다중이용업소정보(상호, 업종, 영업장면적 및 주소, 국민안전처발급 일련번호)

• 계약전 알릴의무사항, 소득 및 재산사항 및 법률 및 국제협약 등의 의무이행을 위한 정보, 금융거래 업무(보험료 및 보험금 등 출ㆍ수납)관련 정보, 계약체결을 위한 보험료 결제정보(금융기관명, 계좌번호 및 카드번호 등 결제에 사용 된 수단의 필요식별정보(카드번호, 카드유효일자, CVC, 예금주(카드주)명 등 고유식별값)

• 당사, 신용정보집중기관(한국신용정보원, 생명ㆍ손해보험협회, 은행연합회 등) 및 보험요율산출기관에서 수집ㆍ관리 하는 보험계약 정보, 피보험자 및 피보험자의 관계자 질병 및 상해에 관한 정보, 보험금지급 관련 정보(사고정보, 본인 의 위임을 받아 취득한 각종 조사서, 판결문, 증명서, 확인서, 진료기록 등)

□ 개인(신용)정보의 보유ㆍ이용 기간

• 수집ㆍ이용 동의일로부터 거래종료 후 5년까지(단, 보험금 지급, 금융사고조사, 분쟁해결, 보험사기 방지ㆍ적발, 민원 처리, 법령상 의무이행을) 위한 경우에 한하여 보유ㆍ이용하며, 별도보관)

2. 개인(신용)정보의 조회에 관한 사항

서울시50플러스재단 및 당사 업무수탁자는「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」및「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 본계약과 관련하여 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 신용정보집중기관, 국민안전처(소방본부, 소방서 포함) 및 보험개발원으로 부터 조회 하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?

개인(신용)정보 조회 동의	□

□ 개인(신용)정보의 조회 목적

• 보험계약의 인수심사ㆍ체결ㆍ유지ㆍ관리(부활 및 갱신 포함), 보험금 등 지급ㆍ심사, 보험사고조사(보험사기조사 포 함), 다중이용업소 화재 배상책임보험 가입대상 확인

□ 조회할 개인(신용)정보

• 당사, 신용정보집중기관(한국신용정보원, 은행연합회 등) 및 보험요율 산출기관, 공공기관에서 수집ㆍ관리하는 정보  보험계약정보 및 보험금지급 관련 정보(사고정보 포함)

• 피보험자 및 계약관계자의 질병 및 상해에 관한 정보, 다중이용업소정보(상호, 업종, 영업장면적 및 주소, 국민안전 처 발급 일련 번호), 신용정보회사 및 통신사의 실명인증 및 본인인증을 위한 정보

□ 개인(신용)정보의 보유ㆍ이용 기간

• 수집ㆍ이용 동의일로부터 거래종료 후 5년까지 (단, 거래종료 후 5년이 경과한 후에는 보험금 지급, 금융사고 조사, 보험사기 방지 및 적발, 민원처리, 법령상 의무이행을 위한 경우에 한하여 보유ㆍ이용하며, 별도 보관)

3. 개인(신용)정보의 제공에 관한 사항

서울시50플러스재단 및 당사 업무수탁자는「개인정보보호법」,「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」및 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 귀하를 포함하는 계약관계자의 개인(신용) 정보를 다음과 같이 제3자에게 제공하고자 합니다. 이에 대하여 동의 하십니까?

개인(신용)정보 제공 동의	□

□ 개인(신용)정보를 제공받는자

• 서울시50플러스재단 및 당사 업무수탁자 : 50+보람일자리 사업 참여자 단체상해보험 가입‧관리‧운영

• 신용정보집중기관 : 한국신용정보원

• 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 보험요율산출기관, 국민안전처(소방본부, 소방서 포함) 등 공공기관, 법령상 업무 수행기관(위탁사업자 포함)

• 보험회사 등 : 생명ㆍ손해보험회사, 은행연합회, 손해보험협회, 국내ㆍ국외 재보험사, 공제사업자 체신관서 (우체국보험), 금융거래 관련 계좌개설 금융기관, 금융결제원, 카드회사, 부가망사업자

• 업무수탁장 등 : 당사와 모집위탁계약을 체결한 자(설계자ㆍ대리점 등), 보험중개사, 계약 체결 및 이행 등에 필요한 업무를 위탁받은 자 (보험사고조사업체 ,손해사정업체, 의료기관ㆍ의사ㆍ변호사, 위탁 콜센터, 건강보험 심사평가원, 건강진단업체, 계약적부조사업체 등)

□ 개인(신용)정보를 제공받는 자의 이용목적

• 서울시50플러스재단 : 50+보람일자리 사업 참여자 단체상해보험 가입‧관리‧운영

• 신용정보집중기관 : 보험계약 및 보험금지급 관련 정보의 집중관리 및 활용 등 신용정보집중기관의 업무, 다중이용업소 화재배상책임보험의 가입관리 및 전산망 연계 관련 업무

• 공공기관 등 : 보험업법 및 자동차손해배상보장법 등 법령에 따른 업무수행(위탁업무 포함), 국민안전처(소방본부, 소방서 포함) :「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 업무수행

• 보험회사 등 : 중복보험 확인 및 비례보상, 재보험 가입 및 재보험금 청구, 보험계약 공동인수, 금융거래업무 (보험료 및 보험금 등 출ㆍ수납)

• 업무수탁자 : 본 계약의 체결ㆍ이행 관련 위탁업무 수행, 진료비심사, 의료심사 및 자문업무

□ 제공할 개인(신용)정보의 내용

•「1.개인(신용)정보의 수집ㆍ이용에 관한 사항」의 정보내용 (단, 각 제공받는 자의 이용목적을 위해 필요한 정보에 한함)

□ 제공받는 자의 개인(신용)정보 보유ㆍ이용기간

• 개인(신용)정보를 제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지(최대 거래종료 후 5년까지)

4. 민감정보 및 고유식별정보의 처리에 관한 사항

당사 및 당사 업무수탁자는 「개인정보보호법」및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 및 「다중이용업소의 안전관리에 관 한 특별법」에 의거 상기의 개인 ( 신용 ) 정보에 대한 개별 동의사항에 대하여 다음과 같이 피보험자의 민감정보 ( 질병ㆍ상해 정보 ) 및 계약관계자의 고유 식별 정보(주민등록번호ㆍ외국인등록번호)를처리(수집ㆍ이용, 조회, 제공)하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?

질병․상해정보 처리 동의	□
주민등록번호․외국인등록번호 처리 동의	□

기재란	주민등록번호	-	성명 및 서명	(서명)

[붙임3]

2019 서울시 50+보람일자리 사업

한지붕세대공감 코디네이터 활동서약서

1. 서울특별시와 서울시50플러스 서부캠퍼스가 시행하는 2019 서울시 50+보람일자리 사업 ‘한지붕세대공감 코디네이터’ 활동조건은 아래와 같습니다. 2. 활동조건 ▪ 사업명: 한지붕세대공감 코디네이터 ▪ 활동처: 서울시 주택정책과 및 각 자치구 ▪ 기 간: 2019.6.3.(월)~12.14(토), 6.5개월 ※ 본 사업은 향후 추가 예산확보 절차 이후 희망자에 한하여 활동기간 연장가능 ▪ 활동조건 - 월 최대 57시간 활동 / 상세 활동일정은 활동처와 협의하에 결정 (중식시간, 지각, 조퇴는 활동시간에서 제외) - 회의활동(월 전체회의 1회, 자치모임 1회) 포함 ▪ 활동비 지원 - 월 최대 57시간 활동 시, 525,020원 지원(9,211원/1시간) - 매월 1회 본인계좌 입금(매월 1일~말일 산정, 익월 10일 지급) ▪ 상해보험가입 3. 기타사항 ▪사업수행기관(서울시50플러스 서부캠퍼스)은「서울시 보람일자리사업 운영지침」에 의거 참여자가 활동과 관련된 규칙을 불이행하거나, 상습적 결근·지각 및 태만 등 태도불량으로 사업에 지장을 초래할 경우 시정명령 및 사업 참여제한 조치를 할 수 있다. ▪위 기재내용 이외의 사항은 「서울시 보람일자리사업 운영지침」에 따라 시행되며, 서울시 방침의 변경 또는 사정에 따라 활동조건은 변경될 수 있다. 4. 보안서약 ▪활동 중 알게 된 개인정보 등 비공개 정보를 활동기간 중은 물론 활동기간 이후에도 사적으로 사용하거나 외부에 일체 누설하지 않는다. ▪활동 중 보유하게 된 개인정보는 활동 상 보유 필요성이 없는 경우에는 즉시 파기한다. ▪한지붕세대공감 코디네이터의 품위를 손상하지 않도록 하고 관련 법령 및 사업지침을 준수하며 사업의 활동 규칙을 따른다. ▪활동 수행 중에 특별한 문제 상황을 인지한 경우에는 지체 없이 사업수행기관 담당자와 공유하고 협의한다. 본인은 위 내용을 충분히 이해하고 규칙에 따라 활동할 것이며, 위반에 대한 조치사항에 대해서도 수용할 것을 확인합니다. 2019. . .
서울시50플러스 서부캠퍼스 서울시 은평구 통일로 684, 8동	성 명 : (서명) 주민등록번호: 주 소 :

[붙임4]

한지붕세대공감 코디네이터 ( )조 자치모임 회의록 기록자 :
일 시	2019. 월 일 / 시간 : ~ : (2H)
장 소
회의 참여자
회의 내용 (모임진행내용)
회의 결과
참석자 사진

사업담당자용		[붙임1]

관리자 보안 서약서

본인은        년      월      일부로 서울시 50플러스 정보시스템 관리자 권한을 요청함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 50플러스 정보시스템 업무 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 업무 수행 중 취득한 각종 정보는 기관의 직원이라고 하여도 본 업무와 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 퇴사 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 업무의 성과가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본인의 업무가 변경 되거나, 퇴사 하게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 권한에 대해 폐기 요청을 한다.(ID 권한 폐기 요청서 작성)

4. 위 서약한 사항을 위반한 사실이 드러날 경우 귀 재단의 관계규정과 민․형사상 등의 조치와 관련하여 어떠한 이의를 제기하지 않을 것임을 확약하며, 만약 이를 위반하여 발생하는 문제 등에 관하여 본인이 일체의 책임을 질 것을 서약합니다.

년       월     일

서   약   자	기   관   명 :

직        위 :

성        명 :	(서명)

[붙임2]

ID 권한 요청서

본인은        년      월      일부로 업무 따른 ID 권한을 요청합니다.

년       월     일

아이디
이름
권한 기간	2018.00.00 ~ 2018.00.00
필요 권한	권한 리스트 체크

[붙임3]

ID 권한 변경 요청서

본인은        년      월      일부로 업무 변동에 따른 ID 권한 변경을 요청합니다.

년       월     일

아이디
이름
권한 기간	2018.00.00 ~ 2018.00.00
필요 권한	권한 리스트 체크

[붙임4]

ID 권한 폐기 요청서

본인은        년      월      일부로 아래 사유에 따라 ID 권한 폐기를 요청합니다.

년       월     일

아이디
이름
폐기 사유

[붙임5]                            권한 리스트

1레벨 : 기관

기관	50+캠퍼스	50+센터	50+ 재단	50+ 포탈
권한	□	□	□	□

2레벨 : 회원

회원	선택기관	전체
권한	□	□

3레벨 : 통계

통계	선택기관	전체
권한	□	□

4레벨 : 통합

통합	공통코드	SMS	EXCEL 다운로드	요청내역
권한	□	□	□	□

5레벨 : 정보시스템

수강	출석관리	신청관리	강좌등록/수정	강사조회	강사등록	학기/학부
권한 □	□	□	□	□	□	□

상담	내상담	예약관리	상담사관리	상담내역 상세조회
권한 □	□	□	□	□

대관	대관승인	공간등록
권한 □	□	□

커뮤니티	커뮤니티 수정	커뮤니티 폐쇄
권한 □	□	□

일자리	보람일자리 사업총괄	보람일자리 사업관리	보람일자리활동관리 (활동처담당자)	인재뱅크 관리	앙코르 일자리 관리	활동처 담담자 (배정용 임시)	공유사무실 관리
권한 □	□	□	□	□	□	□	□

통합정보	파일삭제
권한 □	□

사이트관리

권한 □