보도육교․지하보도 유지보수 소요예산 현황

○ 대상시설 : 시도 상 보도육교와 지하보도(하천횡단, 자치구 관리대상시설 제외)

○ 손상내용 : 구조안전에 관한 보수․보강비용, 부식방지를 위한 도장, 포장, 기능상실이나 구조안전과 관련된 철거비용

※ 시도상 보도육교, 지하보도의 일상유지관리에 소요되는 비용은 제외

※ 강재부식방지를 위한 도장과 관련하여 녹 제거를 철저히 할 수 있는 공정(예 : 그라인딩 등)이 포함될 수 있도록 적극 검토하기 바라며,

※ 콘크리트 및 강구조물 부식의 주요 원인이 되고 있는 “체수”가 발생하지 않도록 배수구 정비 등을 철저히 이행하기 바랍니다.

연번	시설명	상태등급	손상내용	최 근 정비년도	원 인	손상물량	소요예산 (천원)	비고
1	잠원초교앞 보도육교	B	계				66,000	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		난간, 바닥판, 계단부 등	19.30㎡	1,300
			상부교면포장 파손
			시설물 구조안전에 관한 사항		계단 보수재 들뜸 균열(0.3㎜미만)	215.03㎡ 1.4m	64,700
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
2	서래 보도육교	B	계				17,300	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		난간, 교각, 계단부 등	245.79㎡	17,300
			상부교면포장 파손
			시설물 구조안전에 관한 사항
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
3	염곡마을앞 보도육교	B	계				5,600	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		난간, 계단부 등	67.77㎡	4,750
			상부교면포장 파손
			시설물 구조안전에 관한 사항		교각 망상균열	6.3㎡	850
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
4	방일초교앞 보도육교	B	계				17,400	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		바닥판 교각, 계단부 등	134.7㎡	17,100
			상부교면포장 파손		교면파손(대리석)	0.68㎡	300
			시설물 구조안전에 관한 사항
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
5	내곡 보도육교	B	계				15,500	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		바닥판, 교각, 계단부 등	107.82㎡	14,450
			상부교면포장 파손
			시설물 구조안전에 관한 사항		교각 세굴·균열, 균열(0.3㎜미만)	2.22㎡ 0.8m	1,050
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
6	누에다리	B	계				47,000	안전점검 결과 보고서 (별송)
			도장박리박락		측면 케이블, 추락방지망 및 기타부재	30m 이상	47,000
			상부교면포장 파손
			시설물 구조안전에 관한 사항
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음
7	안골마을앞 보도육교	B	계				73,394	정밀안전점검 용역보고서 (별송)
			도장박리박락		난간, 거더부, 계단부	278.9㎡	52,873
			상부교면포장 파손		상부 포장 들뜸, 체수	292.2㎡	20,521
			시설물 구조안전에 관한 사항
			기 타
			철거필요여부	해당사항 없음

1		보도육교 유지보수 정비계획

□ 현황 및 추진배경

○ ‘2019년 도로시설물 정밀안전점검용역’ 및 ‘누에다리(비탈면 포함) 안전점검’ 시행 결과 및 민원 발생에 따라 대상 시설물에 대한 보수․보강공사가 필요하며,

○ 市(시) 도로시설과 ‘시도 상 도로시설물(보도육교, 지하보도) 정비예산 지원’에 의거 필요한 예산을 서울시에 요청, 보수․보강 시행하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 서초구 보도육교 유지보수공사

○ 기    간 : 2020. 상반기 완료 예정

○ 소요예산 : 242백만원

○ 정비대상 : 보도육교 총 7개소(잠원초교 앞 보도육교 외 6개소)

○ 정비내용 : 강구조 부식 예방과 관련된 유지관리(도장, 포장 등)

□ 점검결과 보고

○ 보도육교

연번	명칭	등급	개략공사비	종합결론	비고
계	-	-	242백만원		정밀점검용역 보고서 등 참고
1	잠원초교앞	B	66백만원	○ 제시된 보수․보강공법에 따라 적절한 보수대책을 적용 ○ 보수대책 적용 후에도 시설물에 대한 지속적인 주의관찰이 필요	준공 ’19.10.20.
2	서래		17백만원
3	염곡마을앞		6백만원
4	방일초교앞		17백만원
5	내곡		16백만원
					안전점검 ’19.12.13.
6	누에다리		47백만원
7	안골마을앞		73백만원
					준공 ’18.9.7.

※ 1~5번은 정비예산 부족으로 재요청(관련 방침 : 도로과-684(2020.01.13.)호 참고)

□ 추진계획

○ ’20년 도로시설물 유지보수(연간단가) 계약업체에 지시하여 금년 중 완료

연번1. 위치도 및 현황(손상)사진

잠원초교 앞 보도육교
전경사진	난간 하부 녹 발생
바닥판 녹 발생	교각 균열(0.3mm이상)

연번2. 위치도 및 현황(손상)사진

서래 보도육교
전경사진	난간 하부 녹 발생
계단 상부 녹 발생	계단 하부 녹 발생

연번3. 위치도 및 현황(손상)사진

염곡마을 앞 보도육교
전경사진	난간 하부 녹 발생
기초 파손	계단 하부 녹 발생

연번4. 위치도 및 현황(손상)사진

방일초교 앞 보도육교
전경사진	바닥판 녹 발생
계단상면 부식	교각 기초 부식

연번5. 위치도 및 현황(손상)사진

내곡 보도육교
전경사진	난간 녹 발생
바닥판 녹 발생	계단부 부식

연번6. 위치도 및 현황(손상)사진

누에다리
전경사진	케이블 이음부 빗물 침투 우려 및 녹 발생
부재 격점 부식	추락방지망 이음부 녹 발생

연번7. 위치도 및 현황(손상)사진

안골마을 앞 보도육교
안골마을 앞 보도육교
전경사진	난간부 녹 발생
주기둥 하부 녹 발생	계단부 부식