문서번호	도로보수과-1148
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
민병훈		이수범	03/03 김종호
협조

2020년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가) 발주계획

2020. 03.

성동도로사업소

[도로보수과]

2020년 포장도로 불량맨홀

정비공사(연간단가) 발주계획

우리사업소 관내 시도상 설치된 각종 시설물맨홀중 침하, 단차, 노후 등이

발생한 노후불량맨홀을 정비함으로서 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 차량

통행에 불편이 최소화 될 수 있도록 공사시행에 만전을 기하고자 함.

관련근거

□  2020년 노후포장도로 정비 추진 계획 및 예산 재배정 알림 : 도로관리과-3876호(‘20.03.01.)

□  2020년 신기술 적용제외 대상(공법) 통보 : 기술심사당당관-1049호(‘20.01.15.)

○  *********************************************

예산현황

□  맨홀 정비 : *********

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비(401-01)

발주계획

□  예산 세부 현황

○ 공사명 : 202년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

(단위:천원)

예산과목	계	2020년 포장도로 불량맨홀 정비공사				폐기물처리비 (별도발주)
		소계	도급비	관급비	이전비
***	*******	*******	*******	*	*****	*****

※ 불량맨홀 정비공사(연간단가)로 발생하는 혼합폐기물(폐콘크리트 등)에 대하여 ‘20년 폐아스콘운반 및 처리용역(3구역)에 포함하여 별도 처리

□  발주세부계획

공 사 명	공사개요		입찰형태
	정비수량	세부수량
2020년 포장도로 불량맨홀 정비공사 (연간단가)	**** ********	o 불량맨홀정비(주간) ***** o 불량맨홀정비(야간) *****	o 지명경쟁입찰 - 맨홀보수 신기술 보유업체중 ************** ※ ‘19년 신기술 시공 중 평가 및 점검시 미흡이하로 평가된 ************** 기술심사담당관-1049호(‘20.01.15.)

○ 세부 공정별 내역 : 설계내역서 참조(붙임5)

□  공사기간 : 착공일로부터 ~ ‘20.12.31일 까지

계약방법 검토

□  지명경쟁 입찰에 의한 계약 시행

○ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조

※ 특수한설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 관란한 경우로서 10인 이내인 경우 : ******************

□  입찰참가자격

○ ’20년 현재 서울특별시 건설신기술 활용심의를 득한 신기술로서 철근콘크리트공사업 또는 시설물유지관리업 등록을 필하고, 입찰공고일 현재(낙찰자는 계약체결일까지) 맨홀보수 신기술 공법 보호기간 내에 있는 업체 : 업체현황 (붙임6) 참조

□  ****************************************************

○ 주요개정내용 ; 품질관리 및 사후조치 일부 개정(평탄성 관리기준)

※ **************************************** ***************************

추진일정

□  ‘20. 03. 01. ~ 03. 12. : 예산재배정, 발주방침 및 일상감사 의뢰

□  ‘20. 03. 13. ~ 03. 27. : 계약의뢰 및 적격심사

□  ‘20. 03. 30. ~ 12. 31. : 계약 및 공사시행

붙임 : 1~3) 2020년 노후 포장도로 정비 추진계획 및 예산재배정 알림 1부.

4) 2020년 신기술 특허 적용 제외대상(공법) 통보 1부.

5) 2020년 포장도로불량맨홀 정비공사(연간단가) 설계내역서 1부.

6) 맨홀신기술 보유 업체 현황 1부.

7~8) 맨홀정비 및 관리지침 개정에 따른 맨홀정비공사 공통시방서 배포 예정 알림 1부.

9) 서울시 맨홀정비공사 공통시방서 1부.  끝.