코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(준공기한) 의뢰

1. 동북권사업과-2723호(2020.3.9.)와 관련입니다.

2. ‘삼양로 139길 외 1개소 보행환경가로조성 기본 및 실시설계 용역 외 1’에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

구분	보행환경가로조성	마케팅 및 브랜딩
용역명	삼양로139길 외 1개소 보행환경 가로조성 기본 및 실시설계 용역	4.19사거리 활성화(커뮤니티 마케팅 및 브랜딩) 전략 용역
용역기간	‘19. 7. 23. ~ ’20. 3. 18.	‘19. 7. 16. ~ ’20. 3. 12.
계약금액	122,115천원	145,000천원
계약자	㈜서우티이씨 외 1	㈜수연종합건축사사무소

나. 변경내용(준공기한)

【보행환경가로조성】

○ 과업기간: (당초)  ‘20.  3. 18. → (변경) ‘20. 4. 29.(42일)

구 분		준공기한 내역
용역계약 (기간)변경	당 초	‘19. 7. 23. ~ ’20. 3. 18.
	변 경	‘19. 7. 23. ~ ‘20 . 4. 29.

【마케팅 및 브랜딩】

○ 과업기간: (당초)  ‘20.  3. 12. → (변경) ‘20. 4. 10.(29일)

구 분		준공기한 내역
용역계약 (기간)변경	당 초	‘19. 7. 16. ~ ’20. 3. 12.
	변 경	‘19. 7. 16. ~ ‘20 . 4. 10.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 관련서류(합의각서, 변경 예정공정표) 각 1부.  끝.

	동북권사업과장
주무관	류현석		기반조성팀장	노경래		동북권사업과장	03/10 강성욱
협조자	계약총괄팀장	김대진
시행	동북권사업과-2745	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어빌딩 6층 (서소문동)	/
전화	02-2133-8289	/전송	02-2133-0740	/	master79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)