문서번호	설비부-4316
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	03/23 임정규
협조

「G밸리 근로자 복지센터 건립 통신공사」

관급자재(주차관제장치) 납품기한 연기 검토보고

2020. 03.

도시기반시설본부

(설비부)

「G밸리 근로자 복지센터 건립 통신공사」

관급자재(주차관제장치) 납품기한 연기 검토보고

「G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사」시행 중 선행공사(건축)의 준공기한이 연기되어 관급자재(주차관제장치)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

1		관련근거

□ 관급자재 납품기한 변경 승인요청: PC G밸리제20*******01호(2020.03.23.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2018.04.03.~2020.06.30(총차 2018.04.03.~2020.07.13.)

□ 도 급 비 : 1차 150,000,000원(총차 468,159,386원)

□ 시 공 사 : ㈜새빛전자통신

□ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소

3		검토내용

가. 납품기한 연기 사유

□ 선행공정(건축) 공사기한 연기에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

- 선행공정(G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사) 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비고
준공일자(총차)	~ 2020.07.13.	~2021.02.15.

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용

번호	물품식별번호	품 명	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	********	******	***** ******************	**********	***********	*********	******
*	********	******		**********	***********	*********
*	********	******		**********	***********	**********
*	********	******		**********	***********	*********
*	********	******		**********	***********	*******
*	********	******		**********	***********	*********

번호	물품식별번호	품 명	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	********	******	***** ******************	**********	***********	*******	******
*	********	******		**********	***********	*******
*	********	******		**********	***********	*********
**	********	******		**********	***********	*******
**	********	******		**********	***********	*********
**	********	******		**********	***********	*********

※ 관급 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연장검토 특이사항

□ 주차관제장치 MAS 계약기간 종료

− 주차관제장치 MAS 계약기간 종료로 조달청 시스템상 추가적인 납품기한 연기가 불가함

□ 조치계획

− 업체와 자체 합의하에 납품기한을 연장하고자 하며, 납기 내에 납품 완료시 지체상금 미부과 처리

※ 건설사업관리단 검토의견

□ 선행공정인 건축공정이 완료되지 않아 상기와 같이 납품기한 연장 이 타당함

4		조치계획

□ 건설사업관리단 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 업체와 자체 합의하에 납기를 연장하고자 하며,

□ 해당내용(주차관제장비 납품기한 연장검토)을 계약부서(도시기반시설본부 총무부)에 공문시행코자 함.

붙 임 :  건설사업관리단 검토보고(합의각서 포함) 1부.  끝.