투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(G밸리 근로자 문화복지센터 건립 통신공사 관급자재(주차관제장치)납품기한 연장요청 승인통보)

1.업무지시현장 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사 감리단

(주)무영씨엠건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2020-03-25 11:03:34

3.지 시 내 용

가. PC G밸리 제20*******01(2020.03.23.)호 관련입니다.

나.「G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사」의 관급자재(주차관제장치) 납품기한 변경요청 건에 대해 검토한 결과, 적합하여 승인하오니, 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 관급자재(주차과제장치) MAS 계약기간 종료로 조달청 시스템상 추가적인 납품기한연기가 불가함에 따라 업체와 자체 합의하에 납품기한 연장.  끝.

★주무관							박희준			건축설비과장					03/25 김은덕
협조자
시행			설비부-4457									(						)		접수											(						)
우	12989					경기도 하남시 서하남로 293															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3146-5372						/전송			02-3146-5309					/													/	부분공개(5)