“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	물가변동에 따른 계약금액 조정의뢰(동부,북부,강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역)

우리 본부에서 시행중인 「동부,북부,강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 계약금액 조정 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 :  동부,북부,강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역

2. 용역개요

가. 급수공사 분야(급수공사, 불용관, 보호통교체, 포장 등) : 13,032건

나. 누수복구 분야(누수복구, 포장, 동결관 정비 등) : 14,568건

다. 시설물 분야(노후밸브 교체,배수지 항청소,시설물 보수 등) : 6,420건

3. 용역기간 : ‘19. 06. 22. ~ ‘21. 06. 21.

4. 계약금액 : ***************

5. 계 약 자 : ㈜이준엔지니어링 대표 이승헌 외 1개사

6. 계약금액 조정내역

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총부기 금액	*************	*************	**************
1차 금액	*************	*************	*
2차 금액	*************	**************	**************
3차 금액	*************	*************	*************

7. 변경사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정사항 반영

[경과기간 90일 경과: 195일, 품목조정율 3% 이상: 6.09%]

8. 예산과목

[총차분]

가. 상수도사업비, 영업비용, 배수공사비(급수공사비), 신설공사비

–당초 1,956,150,000원 → 변경 2,036,992,000원(증 22,510,000원)

나. 상수도사업비, 영업비용, 배급수비(상수도관누수복구), 수선유지교체비(감리비)

- 당초 1,932,810,000원 → 변경 2,023,615,000원(증 21,748,000원)

다. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후밸브정비), 시설비및부대비(감리비)

- 당초 810,700,000원 → 변경 845,896,000원(증 11,834,000원)

[금차(2차)분]

가. 상수도사업비, 영업비용, 배수공사비(급수공사비), 신설공사비

–당초 891,330,000원 → 변경 942,221,000원(증 50,891,000원)

나. 상수도사업비, 영업비용, 배급수비(상수도관누수복구), 수선유지교체비(감리비)

- 당초 957,440,000원 → 변경 1,014,090,000원(증 56,650,000원)

다. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후밸브정비), 시설비및부대비(감리비)

- 당초 401,060,000원 → 변경 423,610,000원(증 22,550,000원)

붙 임 :  1. 물가변동에 따른 계약금액 조정(시행문) 1부.

2. 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토보고서 1부.

3. 물가변동 조정보고서 1부.

4. 변경내역서 1부.

5. 관련 법령 사본 1부.

6. 계약금액 조정 검토결과서 1부.

7. 합의서 1부.  끝.

	시설안전부장
주무관	김일구		누수방지과장	이태형		시설안전부장	03/25 신용철
협조자
시행	누수방지과-3746	(		)	접수		(		)
우		서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1523	/전송	3146-1529	/		/	부분공개(7)