투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	성산대교 본교 가설교량 등 재설계 관련 비용 지급 요청에 대한 회신

1. 평화 구조관리부(대외<발>)-2020-545(2020.3.30.)호와 관련입니다.

2. 성산대교 본교 가설교량 등 재설계 관련 비용 지급 요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 관련 업무수행에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

1) 성산대교 본교 성능개선 공사에 필요한 가교 설치를 위해 서울지방국토관리청에서 요구한 하천점용허가 조건인 『가교의 경간장검토, 세굴영향검토, 가설교량 설치전·후 수리영향 검토』 등 추가적인 수리검토 비용은 본교 공사 발주 내역서에 포함하여 지급할 예정이며,

2) 다만 공사 발주 내역서 보완 등은 귀 사에서 기 제출한 재설계 과업수행계획서에 포함된사항으로 추가적인 비용지급은 불가함을 알려드립니다.

3) 아울러, 2020년 예산조기집행 관련해서 성산대교 본교 성능개선 공사발주가 4월중에는 이루어 져야하는 사항으로 재설계 용역을 2020.4.15.까지는 완료하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)평화엔지니어링,(주)진우엔지니어링코리아,(주)동해종합기술공사
주무관	배원영		토목설계과장	김동현		토목부장	03/31 김용제
협조자
시행	토목부-6559	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/	bwy600@seoul.go.kr	/	부분공개(5)