투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 공정계획 변경(3차) 승인 알림

1. 남서울2020-124호(2020.2.11.)와 관련입니다.

2. 신림선 도시철도 민간투자사업에 따른 예정공정표 변경(3차)에 대하여 실시협약       제23조(공정관리)에 의거 원활한 사업관리를 위해 승인 통보하였음을 알려드리니      관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전체 예정공정률 변경현황

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
당 초	5.3%	15.9%	34.9%	78.0%	99.6%	100%
변 경	5.3%	16.1%	36.6%	75.6%	99.4%	100%
증·감	0%	증) 0.2%	증) 1.7%	감) 2.4%	감) 0.2%	0%

▸신호, 통신 공정률 변경에 따라 전체 공정 보할 변경

나. 예정공정표 주요 변경내용

1) 토목, 건축 및 시스템(궤도, 전기, 기계 등)분야 : 공정변경 없음.

2) 신호 및 통신분야 : 공사 전 설계, 제작 일정 및 공사 후 검사 및 시험,    시운전 등 미반영된 공정 추가 반영

- ‘19.12 ~ ’21.05(18개월) ⇒ ‘18.07 ~ ’22.02(44개월)

붙임 : 방침서 및 예정(3차 변경)공정표 각 1부. 끝.

	도시철도사업부장
수신자	도시철도계획부장,도시철도토목부장,도시철도건축부장,도시철도설비부장
주무관	이덕배		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	03/31 최병훈
협조자
시행	도시철도사업부-3635	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7186	/전송	02-772-7305	/	ledb8888@seoul.go.kr	/	대시민공개