문서번호	설비부-4739
결재일자	2020.4.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시책사업과장	설비부장
이극희	이종근	04/01 임정규

『동부간선도로 (2공구) 확장공사』

관급자재(축류송풍기) 구매계획 검토보고

2020. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

『동부간선도로 (2공구) 확장공사』

관급자재(축류송풍기) 구매계획 검토보고

『동부간선도로 (2공구) 확장공사』기계공사용 자재에 소요되는 관급자재인 축류송풍기 설비 구매계획을 보고 드림.

1		공사개요

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(2공구)공사 - 기계공사

❍ 공사위치 : 녹천교 ~ 상계주공아파트 11단지

❍ 공사규모 : 4차로→6차로, 3.2km

도봉지하차도 L=2,990m(U-type 330m포함, 편도3차로)

❍ 공사기간 : ‘08.12.30. ~ ’21.10.31.

❍ 공 사 비 : 13,983백만원(기계공사)

❍ 감리/시공사 : ㈜이산/㈜한라

2		구매 검토

관련근거

❍ ******************************************************

❍ 지하차도용 관급자재(축류송풍기, 차단문) 구매요청 건 : 동부2감-20-197호(2020.03.27)

구매개요

품 명	규격	수량	소요예산 (천원)	계약방법	납품설치
***** 설비	***** ***********	2대	*********	********	********
	***** ***********	2대

건설사업관리단 기술검토

❍ ******************************************************************************

검토(조치) 의견

❍ ****************************************************************

- *******************************

3		구매 계획

건명 : ************

❍ 구매방법 : ********

❍ 관련규정

-『조달사업에 관한 법률』제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

-『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조 및 제12조

❍ 소요예산 : ***********

❍ 구매내역

분야	품 목	규격	수량	소요예산 (천원)	계약방법	비고
기계 설비	***** *****	***** ***********	**	*******	********	** **
	***** *******	***** ***********	**	*******
	*** *****	*********	**	******
	*** *******	*********	**	******
	*** *****	*****************	**	******
	*** *******	*****************	**	*******
	************		**	******
	***			*********

❍ 계약방법 : ********

- 입찰참가자격

(1)******************************************       *************************************

(2)*********************************************      ***************************************      ***********************

❍ *******

- ***********************************************

- ***************

4		향후 계획

❍ ‘20. 4.       : **************

❍ ‘20. 5.       : 계약 및 제작도서 승인

❍ ‘20. 6.~ 10. : 공장제작 및 성능검사

❍ ‘20. 11.      : 현장설치 및 시운전

붙임 1. 관급자재 산출내역서.

2. 건설사업관리기술단 기술검토서.

3. 관련 첨부자료.  끝.