문서번호	도시철도설비부-3784
결재일자	2020.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
신용준		김흥정	04/06 김영수
협조

『하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사[3차]- 1회』

기성검사 결과 보고

2020. 04.

도시철도 설비부

『하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사 (3차)-1회』

기성검사 결과 보고

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사(3차)에 대한 1회 기성검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사[3차]

□ 공사규모 : L=1.1km, 정거장1개소, 입출고선 1.33km, 환기구 3개소

□ 공사기간 : *********************************

**********************************

**********************************

**********************************

□ 시 공 사 : (주)태원전력, ㈜씨티아이앤아이,㈜부민통신

□ 감 리 사 : 동일기술공사, 세종기술, 혜원까치종합건축사, 융도엔진니어링

□ 계약금액 : 총차 3,956,537천원 (3차 계약금액 1,123,000천원)

[단위 : 천원]

구 분	총 차	1차계약	2차계약	3차계약	장 래
도 급 비	*********	*******	*********	*********	*******
공 정 율	****	***	***	***	***
공사기간	*********** ************	*********** ************	*********** ************	*********** ************	************

Ⅱ		기성 검사 현황

□ 일   시 : 2020. 04. 01.(수)

□ 장   소 : 하남선 1공구 현장 및 건설사업관리단 회의실

□ 2회 기성기간 : 2019.12.01.~2020.03.31

□ 기성 검사자 : 비상주 감리원 김태위

□  입회자

- 도시철도 설비부 : 신용준

- 전기분야건설사업관리기술자 : 이재봉

- 현장대리인 : 채석환

Ⅲ		공사 추진 현황

□ 기성 공정율 : 3차수 공사 대비 26.71 [%]

[단위: 천원]

구 분	계약금액	기 성 액			잔 액	비고
		전회까지	금회기성	누 계
기성금	*********		*******	*******	*******
공정율	100.0%		26.71%	26.71%	73.29%

구 분	공 종	단위	3차 물량	3차공사 기성 물량			누계 요율
				전회	금회	누계
정거장	전기실배선설비공사 -강제전선관	m	67	0	67	67	100%
	전기실접지설비공사 -접지용비닐절연전선	m	104	0	104	104	100%
	전력간선설비공사 -강제전선관(36mm)	m	950	0	190	190	20%
	동력설비공사 -강제전선관(노출)	m	1567	0	538	538	34%
	정거장 전등 및 전열 설비공사	m	5823	0	690	690	12%
본선 환기 및 터널	전등 및 전열설비공사 -내열비닐절연전선	m	551	0	551	551	100%
	터널전등공사 -내열비닐절연전선	m	226	0	0	0	0%

□ 주요기성 수량

Ⅳ		금회 기성내역

[단위: 원]

구 분	계 상 금 액				비고
	합 계	㈜태원전력 (45%)	㈜씨티아이 앤아이 (15%)	㈜부민통신 (40%)
*******	***************	************	************	************
******	************	*************	************	*************
******	************	*************	************	*************	금회포함
*******	************	*************	*************	*************

Ⅴ		감리원 검토의견

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사(3차) 1회 기성검사를 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 실시한 결과 적합하게 시공되었다고 사료됨.

따로붙임 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사(3차) 1회 기성검사 결과보고  1부  끝.