“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-9685		주무관	조경팀장		공원녹지과장		도시환경국장
			이경섭	방일길		김현경		04/07 안재혁
등록일자	2020.4.6.
결재일자	2020.4.7.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		예산팀장		이채목
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

“2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사(긴급)” 설계변경 추진계획 보고

2020.  4.

	강 남 구
(		공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 • 안전행정부 예규 제77호(2017.1.23.)「지방자치단체 입찰 계약 집행기준」
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 통일성 있는 가로경관 조성을 위해 가로수 가지치기 물량 증가
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 강남구 건설공사 설계기준 및 표준품셈
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 시민 다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 해당 관련부서 및 규정 제반사항 적정
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

“2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사(긴급)” 설계변경 추진계획 보고

우리구에서 시행중인「2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사」와 관련하여 가로수로 인한 안전사고 예방 및 쾌적한 가로경관조성을 위한 가로수 가지치기 물량변경 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 함.

1		사업개요

❏ 사 업 명 : 2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사

❏ 공사기간 : 2020. 2. 27 ~ 2020. 04. 09.

❏ 공사개요 : 개포로 등 17개 노선 양버즘나무 등 4종 2,065주 가지치기

❏ 도 급 비 : ***************************

❏ 도 급 자 : *****************

2		설계변경 및 정산내역

❏ 설계변경

구 분	설계변경 사유(실정)	변경내역	비고
가지치기	■ 가로수 가지치기 물량 증가 - 통일성 있는 가로경관을 위해 배전선로 주위에 있는 구청주 물량 증가	- 당초 : 양버즘나무 등 2,065주 - 변경 : 양버즘나무 등 2,300주	*************

❏ 정산내역

구 분	정 산 내 용	비 고
제경비	**************************************** ******************************** ****************************** *******************************	*************
합계	■ 도급액 - *************************************************

3		도급비 변경(정산)내역

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
총공사비		209,563,000	240,000,000	************
도급비	공급가액	190,511,819	218,181,819	************
	부가가치세	19,051,818	21,818,181	***********
	총 계	209,563,000	240,000,000	************

4		예산집행계획

❏ 확보방안 : 본 사업비 내에서 예산잔액(낙찰차액) 사용

사 업 명	예산액 ①	원인행위액 ②	예 산 잔 액 (낙찰차액포함) ① - ②	사 용 액 (원)	비고
2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사	240,340,000	209,563,000	30,777,000	30,437,000

❏ 예산과목

- 한전부담금

5		보고자 의견

❏ 상기와 같이 설계변경처리하여 사업추진에 만전을 기하여 쾌적하고 안전한 거리를 조성하고자 함.

붙임 : 1. 변경설계내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.