문서번호	경제정책과-6927
결재일자	2020.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		콘텐츠산업팀장	경제정책과장
이옥희		이진숙	04/23 이방일
협조

충무로 영상센터 사업계획 변경 검토보고

2020. 4.

경제정책실

(경제정책과)

충무로 영상센터 사업계획 변경 검토보고

충무로 영상센터 냉난방기 교체 관련 비용 증액 요청이 있어 이에 대해 검토보고 드림

□ 검토배경

○ 충무로 영상센터 냉난방시설 노후로 교체 추진

- 실외기 및 에어컨 5대 교체 시행(’19.12.)

- 예산소요를 감안해 순차적 교체계획 수립(’20년 갤러리, ’21년 장비보관실 예정)

○ 코로나19 확산 방지를 위한 갤러리, 아카이브, 상영관 등 휴관

○ 휴관기간 동안 장비보관실 냉난방시설 교체(’21년 예정)까지 동시에 추진하고자 서울영상위에서 사업계획 변경 요청[서울영상위-139(’20.4.22.)호]

□ 서울영상위원회 사업계획 변경 요청사항

○ 요청사항 : ’20년 ‘갤러리’ 냉난방시설 교체시 ’21년 예정된 ‘장비보관실’ 냉난방시설 교체까지 동시에 추진

******************************************************

□ 검토사항

○ ’19.12월 충무로 영상센터 냉난방시설 교체공사 추진시 실외기 및 에어컨 5대(편집실, 사무실, 아카이브 2대, 상영관) 교체 완료

○ 코로나로 인한 휴관기간 동안 냉난방시설 교체시 시민 불편 없이 추진 가능

○ 추가 비용은 휴관으로 인한 3~4월 교육프로그램 및 상영 취소에 따른 불용재원으로 보전 가능하여, 충무로 영상센터 사업 운영에는 차질 없음

*************

********	*******	**
******	*********	******************
	********	**************************
**	********	*******************
****	**********	********************

□ 향후계획

○ 사업계획 변경 승인 통보(서울시→영상위)	: 4월말

○ 냉난방시설 교체 공사(영상위)	: 5월초(1일 소요)

붙임 1. 서울영상위 사업계획 변경 요청 공문 1부.

2. 충무로 영상센터 예산변경사항 1부.  끝.