코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(준공기한) 의뢰

1. 동북권사업과-4562호(2020.4.27.)와 관련입니다.

2. 『삼양로 139길 외 1개소 보행환경가로조성 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명:  삼양로139길 외 1개소 보행환경가로조성 기본 및 실시설계 용역

○ 과업기간: ‘19. 7. 23. ~ ’20. 4. 29.

○ 계약금액: 122,115천원

○ 계 약 자: ㈜서우티이씨 외 1

나. 변경내용(준공기한)

○ 과업기간: (당초)  ‘20.  4. 29. → (변경) ‘20. 6. 30.

구 분		준공기한 내역
용역계약 (기간)변경	당 초	‘19. 7. 18. ~ ‘20 . 4. 29.
	변 경	‘19. 7. 18. ~ ‘20 . 6. 30.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 관련서류(공문, 합의각서, 변경 전·후 예정공정표) 각 1부.  끝.

	동북권사업과장
주무관	류현석		기반조성팀장	노경래		동북권사업과장	04/28 강성욱
협조자	계약총괄팀장	김대진
시행	동북권사업과-4604	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어빌딩 6층 (서소문동)	/
전화	02-2133-8289	/전송	02-2133-0740	/	master79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)