문서번호	설비부-6436
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
나경운		여인웅	05/06 임정규
협조

『딜쿠샤 원형 복원 공사 기계설비 관급자재』

냉난방기 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

〔딜쿠샤 원형 복원공사 기계설비 관급자재〕

냉난방기 납품기한 연기 검토 보고

「딜쿠샤 원형 복원공사」의 선행공정 지연 및 설계변경으로 관급자재(냉난방기) 납기를 연기하고자 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 딜쿠샤 원형 복원공사

□ 위    치 : 서울시 종로구 사직로2길 17

□ 공사기간 : 2018. 11. 9. 〜 2020. 11. 10.

□ 공 사 비 : 2,021백만원(도급 1,991, 관급 30)

□ 도 급 사 : ㈜도형산업

□ 감 리 단 : ㈜예쓸디자인건축사사무소

2		계약 현황(관급자재)

□ 계약 상대자 : 엘지전자 주식회사

□ 계약 금액 : 30,174,460원(조달 수수료 포함)

□ 계약 일자 : 2019. 8. 26.

□ 납품 기한 : 2020. 7. 31.

3		검토 내용

□ 납품기한 변경(연장) 사유

- 딜쿠샤 내·외부 생활폐기물 분류 및 처리, 석축 구조보강 옹벽설치, 2회 설계 변경에 따른 건축 공정일정 변경으로 당초 예정된 기간 내에 냉난방기를 설치가 불가하여 납품기한 연장이 필요 함.

□ 변경 내용

구분	계약번호	계 약 금 액		납 품 기 한		비고
		당초	변경	당초	변경
3차	00198157401	30,174,460원	변경없음	`20.7.31.	`20.11.30.	증)122일

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		건설사업관리기술자 의견

□ 딜쿠샤 내 외부 생활폐기물 분류 및 처리, 딜쿠샤 석축구조 보강 옹병 설치, 2회 설계변경에 따른 공사량 증가, 자문회의 결과에 따른 조치로 인한 건축공사기간 연장으로 당초 예정된 기간에 냉난방기를 설치하는데 어려움이 있음.

□ 냉난방기 시운전 및 인수인계를 고려하여 냉난방기 납품기한을 변경하는 것이 타당하다고 사료 됨.

5		보고자의견

□ 선행 공종(건축공사)의 일정에 맞추고 냉난방기 적절한 성능을 확인하기 위한 시운전 및 인수인계를 고려하여 책임건설사업관리 기술자 검토 의견이 타당하다고 사료되어 계약부서에 관급자재(냉난방기) 변경계약(납기연장) 요청하고자 함.

붙임  딜쿠샤 원형 복원공사 냉난방기 납품기한 연장 검토 보고 1부.  끝.