문서번호	기후대기과-6809
결재일자	2020.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건물온실가스감축팀장	기후대기과장
김문균	최형준	05/14 조완석

'20년 공공부문 BRP 사업내용 변경 검토 보고

2020. 5.

기후환경본부

(기후대기과)

’20년 공공부문 BRP 사업내용 변경 검토 보고

□ 검토근거

○ 은평구 : ’20년 시 소유건물 BRP 사업내용 변경 요청(주거재생과-14225, 2020.5.13.)

○ 광진구 : ’20년 노유자시설 BRP 사업내용 변경 요청(환경과-17890, 2020.5.13.)

□ 요청사항

○ 은평구 : 사업금액 변경에 따른 재배정액의 감재배정 요청

- 사업대상 : 산새마을 주민공동이용시설(市 주거환경개선과→은평구 주거재생과 관리위임)

- ******************************************

- 변경내용 : 당초(80,000,000원) → 변경(46,180,000원, △33,820,000원)

- 사업신청내역

당 초		⇒	변 경
합 계(단위 : 원)	80,000,000		합계(단위 : 원)	46,180,000
1층, 1.5층 중문설치	10,000,000		1층, 1.5층 중문설치, 지하 출입문 추가설치	4,700,000
지하, 1.5층, 2층 전기온돌 설치	30,000,000		1.5층, 2층, 3층 전기온돌 설치	10,710,000
3층(게스트하우스) 보일러 단독운행 시행	10,000,000		기존 일체형 물탱크 및 보일러 철거 후 각 층마다 콘덴싱 순간온수기 설치	13,160,000
이중창호 교체	30,000,000		이중창호 교체	17,610,000

○ 광진구 : 사업대상 변경(8개소→7개소), 개소당 지원액 변경

- 교부내역 : 어린이집 8개소 / 42,000천원 교부(’20.4.13.)

- 사업대상 : 당초(구의2동 어린이집 8개소 쿨루프 설치) → 변경(구의2동 어린이집 7개소 쿨루프 설치)

- ****************************************

- 변경내용 : 예산변경 없이 사업대상(8개소→7개소)․개소당 지원액(5,250천원→6,000천원) 변경

□ 검토결과

○ 은평구(市 소유건물 BRP) : 사업내용 변경 승인

*******************************************************

○ 광진구(노유자시설 BRP)  : 사업내용 변경 승인

□ 행정사항

○ ’20년 공공부문 BRP 사업내용 변경 승인 통보

○ ’20년 공공부문 BRP 감재배정액(33,820천원)에 대한 별도 집행계획 수립

붙임  사업내용 변경요청 공문 각 1부.  끝.