문서번호		공원녹지과-9316		주무관	공원기획팀장	공원녹지과장		도시관리국장
결재일자		2020.5.19.
				김용석	김혜란	신현호		05/19 김유식
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
					기획예산과장		박규탁
					예산팀장		정세진
	국제규모 인공암벽장 조성사업 실시설계용역 추진계획
2020.5.18.
강 북 구

국제규모 인공암벽장 조성사업 실시설계용역 추진계획

북한산 인수봉 주요 등산 코스 주변에 스포츠클라이밍 저변 확대 및 생활체육공간 확충을 위해 추진 중인 「국제규모의 인공암벽장 조성사업」실시설계용역 추진계획을 다음과 같이 수립하고자 함

□ 추진근거

○ 국제규모 인공암벽장 조성사업 변경추진 계획 공원녹지과-2288(2020.02.06.)

□ 사업개요

○ 위    치: 우이동 185-9

지 목	대지면적 (㎡)	지역/지구	소유자	비 고
대 지	836	자연녹지지역, 개발제한구역	강북구	‘20.1월 협의취득

○ 규    모: 18m×6.9m, 높이 18m(3층)

※ 용역결과에 따라 규모는 변경될 수 있음

○ 기    간: 2019. 4. ~ 2021. 5.

○ 총사업비 : 3,400백만원(시비 1,800, 구비 1,600)

- 기확보 : 1,600백만원(‘19년 구비) / 미확보 : 1,800백만원

○ 사업비(구비) 집행현황(2020. 5월 현재)

(단위 : 천원)

당해예산 (2019년)			명시이월 (2020년)
계	집행액	집행잔액	계	집행액	집행잔액
1,600,000	1,488	1,598,512	1,598,512	1,053,104	545,408

○ 사업내용 : 국제규모 인공암벽장(난이도벽, 속도벽, 볼더링벽)

부대시설(관리실, 탈의실 및 화장실, 조명탑 등)

□ 그간의 추진사항

○ 2019. 04. 23. : 추진계획 수립

○ 2019. 05. 07. : 공유재산 심의(토지매입 원안가결)

○ 2019. 07. ~ 08. : 토지매입 협의(區⇔토지소유자)

○ 2019. 09. : 토지매입 추진계획 수립, 보상계획 통지

○ 2019. 10. : 협의보상금 산정액 결정 및 통지

○ 2020. 01. 20. : 토지 협의취득(완료)

○ 2020. 02. 06. : 사업대상지 변경계획 수립

○ 2020. 02. 24. : 區투자심사(적정)

□ 실시설계용역 추진계획

○ 과 업 명 : 국제규모 인공암벽장 조성사업 실시설계용역

○ 과업위치 : 우이동 185-9

○ 과업기간 : 착수일로부터 90일간(2020. 5. ~ 8.)

○ 용 역 비 : 50백만원(구비 집행잔액 활용)

○ 계약방법 : 수의계약

- 사업의 시급성을 감안하여 설계경험이 풍부한 여성기업과 계약추진

○ 용역내용

- 현지조사 및 관계법령 검토

- 인공암벽장 건립(스포츠클라이밍 포함) 관련 건축, 조경, 토목, 기계, 전기, 소방 등 설계도서 작성

- 건축 협의에 필요한 제반서류 작성 등

□ 향후 추진일정

○ 2020. 5. ~ 8. : 실시설계용역 시행

- 2020. 6. : 전문가 및 공공건축가 자문회의 개최

- 2020. 7. : 경관 및 건축심의, 건설기술 심의

- 2020. 8. : 계약심사, 일상감사

○ 2020. 9. ~ 2021. 5. : 공사 시행

□ 행정사항

○ 잔여예산(구비) 실시설계용역비 활용 ······················ 기획예산과

붙임 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 국제규모 인공암벽장 조성사업 변경추진 계획 1부.

3. 용역내역서 및 과업내용서 각 1부.  끝.