문서번호	방재시설부-6158
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설과장
김상용		박희천	대결 07/14 서관석
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

서남분뇨 가시설 활용 검토보고

2014. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

서남분뇨 가시설 활용 검토보고

『서남분뇨시설 증설 및 현대화사업』 과 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 차수벽 가시설(Sheet Pile) 중복구간에 대하여, 서남분뇨현장에서 선 시공된 가시설을 활용함으로서 예산을 절감코자 함.

관련근거

○ 도화(서남)2014-226(‘14.07.10) 『실정보고(서남분뇨 시설현대화 가시설 공동사용 보고)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ∼ 2015. 08. 09

○ 계약방법 : 설계·시공 일괄입찰(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 총도급비 : 277,603백만원

실정보고 내용

○ 가시설 설계현황

당 초	변 경
	중복구간
시설현대화 차수벽설치/인발 : 2,183본(L=50m, 125본)	시설현대화 차수벽설치/인발 : 2,058본 (감125본)
	서남분뇨현장 차수벽 인발 : 142본(L=56.8m, 142본)

○ 내 용 : 『서남분뇨증설 및 시설현대화사업』 과 『서남물재생센터 시설현대화사업』의 차수벽 가시설(Sheet Pile) 중복구간에 대하여, 서남분뇨현장에서 선시공된 가시설을 활용하여 예산을 절감코자 함.

※ 당초 설계된 설계수량은 감 조치하며, 서남현장의 사업기간이 분뇨현장 준공이후 이므로 인발부분은 서남현장에서 처리함

○ 문제점 : 공사준공 시기가 달라 서남분뇨 시설현대화공사의 마무리 공종인 토공(복토) 및 조경공사에 대하여는 추후 협의가 필요 함(※ 추후 복토ㆍ조경 등은 추후 협의하여 보고 예정임)

○ 개략공사비 검토                                            (단위 : 천원)

구 분	금 액		증ㆍ감	비 고
	당 초	변 경
가시설(L=50m, 125본)	2,589,497	2,448,182	-141,315
제경비	1,264,603	1,196,458	-68,145
합 계	3,854,100	3,644,640	-209,460	토공, 조경 미반영 금액

※ 책임감리현장 감사시 절감액을 가시설+토공+조경공사를 포함하여 개략공사비 34백만원으로 보고함

검토 및 조치계획

○ 본 실정보고는 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화공사에서 선시공한 가시설(Sheet Pile)을 서남물재생센터 시설현대화 현장의 차수벽으로 활용함에 따라 예산을 절감코자하는 내용으로

○ 입찰안내서 공사계약 일반조건 제21조 ④항에 의거 정부의 책임있는 사유(공사계획변경)에 해당하므로 전체 계약금액에서 감액 설계변경코자 하며, 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 실정보고를 승인코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.