문서번호	설비부-7989
결재일자	2020.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		代이극희	06/04 代여인웅
협조

스페이스살림 조성 통신공사(3차)

준공기한 연장 검토 보고

2020. 6.

「스페이스살림 조성 통신공사(3차)」

준공기한 연장 검토 보고

『스페이스살림 조성 통신공사(3차)』와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 준공기한 연장 실정보고 검토건에 대하여 검토후 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 스페이스살림 조성 통신공사(3차)

❍ 공사규모 : 지하3층/지상7층, 연면적  17,637㎡

❍ 공사기간 : 2018.9.10. ~ 2020.6.30.(총차)

2019.12.13. ~ 2020.6.30.(3차)

❍ 공사금액 : 총차 898,578,967원 (3차 513,050,967원)

❍ 시 공 사 : ㈜에이테크정보기술 대표 이정우

❍ 건설사업관리단 : ㈜희림컨소시엄건설사업관리단

2		감리단보고내용

❍ 검토근거 : HTSC 2006-01호 (2020.06.02.)

- 「스페이스살림 조성 통신공사(총차, 3차) 준공기한 연장에 대한 적정성 검토 보고」

❍ 보고내용 :  통신공사(3차) 공사기간 연장 검토 요청

3		준공기한연장내용

❍ 계약기간 조정

구 분	차 수	당 초	변 경	계약금액	비 고
통신	총차	‘18.9.10～’20.6.30.	‘18.9.10.～’20.9.29.	변동없음	증) 91일
	3차	‘19.12.13.～’20.6.30.	‘19.12.13.～’20.9.29.		증) 91일

❍ 연기사유 : 선행공사(건축,토목) 추가 공사에 따른 공기연장

❍ 공사기간 연장 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

4		조치의견

❍ 본 공사 건설사업관리단의 실정보고 사항을 검토한 결과, 내용이 적정하다고 판단되므로, 총무부에 계약변경 의뢰하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.,

따로붙임 : 감리단 실정보고 검토요청 공문 1부.  끝.