실정보고 검토서

공 사 명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m,  연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.2.1.~'21.1.30.

· 도 급 비 : 35,693백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링외

2개사

실정보고 건명

철도보호지구 행위관련 조건사항 반영〔반포사관 제2020-250((2020.6.19.)〕

실정보고

사    유

지하철3호선 철도보호지구 행위관련 조건사항(계측관리, 확인측량, 공사중점검, 정밀안전점검, 공사안내간판) 반영

건설사업관리자

검  토  의  견

철도안전법에 따른 지하철3호선 철도보호지구 행위 관련 서울교통공사 조건사항 반영은 타당하다고 판단됨.[신규비목 협의율(93.798%) 적용]

공  기  에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고(증·감)
규모	계측관리(천단침하 외 6) 72조	계측관리(천단침하 외 6) 132조 확인측량 1식 정밀안전점검 1식 공사중 점검(6),안내간판(4)	계측관리(천단침하 외 6) 60조 확인측량 1식 정밀안전점검 1식 공사중 점검(6),안내간판(4)
금액	***********	***********	**********

예산조치

계    획

당초 도급비 범위내 시행가능( ), 당초 사업비 범위내 시행가능(○) 별도(추가) 예산 확보 필요( )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발 주 처

검토의견

건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 실정보고

사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

비     고

· 계측관리[교차부 반대측 선로 계측기(노반침하, 라이링균열, 라이링변형) 추가

(2개소), 전단면 변위(자동계측),  환기구 자동계측, 진동계측],

· 확인측량(지하철3호선 TBM터널 통과구간 위치표기 및 도면작성)

· 공사중 점검(6회), 정밀안전점검(공사 전·중·후), 안내간판(4개소)

결재

담당

송영배

과장

손창익

부장

06/23

박홍봉