문서번호		도로관리과-9942		★주무관		굴착관리팀장	도로관리과장		건설안전교통국장		부구청장		구청장
결재일자		2020.6.29.
				김성민		최병수	황인수		이진호		오해영		06/29 박겸수
공개여부		대시민공개
				협 조	기획예산과장			박규탁
					건설관리과장			조병훈
보도여부
					예산팀장			정세진
					건설관리팀장			김영곤
	「삼양로 외 1개소」 2021년도 강북구 지중화사업 추진계획
2020.6.26.
건설안전교통국 (도로관리과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
예산 확보		( 민자 )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	(한전, 통신사 )
	관련 부서	( 건설관리과, 기획예산과 )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

「삼양로 외 1개소」

2021년 강북구 지중화사업 추진계획

우리 구 관내 도로상 한전주와 통신주가 난립되어 있는 도봉로 및 삼양로의 가공 선로를 지중화 함으로써 주민 통행 불편을 해소 하고 도시 미관을 개선하고자 함.

추진근거

Ⅰ

□ 2021년 지자체요청 지중화사업 신청요청 (한국전력공사 강성지(전력)-425, 2020.05.25.)

□ 「서울시 가공배전선로 지중화사업 기본계획」에 따른 강북구 지중화사업 추진계획 방침

□ 한전, 서울시 지중화담당과 사업구간 사전 합동조사 실시(서울시장 삼양동 한달살이)

사업개요

Ⅱ

□ 사 업 명 : 삼양로 외 1개소 지중화사업

□ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업대상

구 간	연장 (m)	지중화대상(본)			비고
		계	전주	통신주
삼 양 로 (삼양사거리 ~ 삼양초등학교 입구)	450	22	21	1
노 해 로 (광산사거리 ~ 수유사거리)	700	24	23	1

□ 소요예산                                             (단위 백만원)

구 분	계	재원구성 내역			비고
		한전 및 통신사	시비	구비
총 계	4,200	2,100	1,050	1,050
삼양로	1,648	824	412	412
노해로	2,552	1,276	638	638

추진 절차 및 예산확보 계획

Ⅲ

□ 사업 추진절차

지중화 사업계획서 제출		사업 승인 및 협약서 체결		실시설계 및 사업비 청구		사업추진		정산
區 → 한전 및 서울시		한전(통신사) → 區		한전 및 통신사 → 區		區 ↔ 한전 및 통신사		市, 區, 한전, 통신사

□ 예산 확보 계획                                        (단위 백만원)

연번	구분	자치구 부담 소요예산			예산 편성 계획	비고
		총계	지중화 사업비	도로복구비
	계	1,650	1,050	600	21년 회계년도 반영
1	삼양로	650	412	238
2	노해로	1,000	638	362

□ 사업비 분담비율

- 지자체 50%(시 25%, 구 25%), 한전 및 통신사 50%

- 도로복구비 전액 지자체(구) 부담

향후 계획

Ⅳ

□ 2020. 07. : 지중화사업 신청

□ 2021. 01. : 지중화사업 선정 결과 발표

□ 2021. 05. : 업무협약 체결 및 지중화사업비 선납

□ 2021. 06. : 지중화사업 실시 설계

□ 2022. 03. : 지중화사업 착공

□ 2022. 12. : 지중화사업 준공 및 정산

행정 사항

Ⅴ

□ 지중화사업 자치구 부담 예산 확보 : 기획예산과

□ 지상기기 및 지중설비 점용료 50% 감면(협약시) : 건설관리과

따로붙임 : 1. 2021년도 지중화사업 위치도 1부.

2. 강북구 지중화사업 추진계획 방침 사본 1부.  끝.