문서번호	도시철도설비부-6523
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
정해철		임정규	07/17 정찬웅
협조
	주무관		이진근

5호선 하남 연장 기본설계관련

관계기관 회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.7.

도시철도설비부

5호선 하남 연장관련 관계기관 회의결과 보고

▢ 개요

○ 안건 : 5호선 하남연장관련 기본설계 협의

○ 일시 : 2014.7.16.(수) 15:00~17:00

○ 장소 : 서울도시철도공사 차량계획과

○ 참석자

- 서울시 : 정해철, 이진근 주무관

- 도시철도공사 : 민승곤 차량처장, 박병순 차장, 박정선 과장

- 설계사 : 김영훈 과장(메트로텍)

▢ 회의내용

< 서울시 >

○ 2018년 개통목표로 추진중인 5호선 하남연장의 기본설계 기간은 2015년7월 까지이며, 철도안전법 개정에 따른 차량제작기간(4년)이 기존보다 많이 소요되어 차량제작 규격서가 완료되면 5호선 신조차 발주가 이루어 져야함.

○ 설계사는 차량제작기간을 검토하여 제작기간을 고려한 신규전동차 제작 구매 규격서를 작성하기 바람.

○ 기본설계 공정은 ‘14.12.까지 현장조사를 마무리하여 기본계획을 완료 목표로 추진하고 있으므로 설계사의 각 기지 방문 및 기술자료 요청 등에 도시철도공사는 적극 협조하여 주기 바람.

< 도시철도공사 >

○ 기존 5호선 차량중 95년에 도입된 1단계 차량은 2020년에 대폐차 대상은 2015년 초 차량의 기대수명을 측정하여 대폐차 또는 연장사용등을 검토할 예정임

○ 5호선 차량의 기대수명 측정에 의거 대폐차 결정시 대폐차 차량도 하남연장 사양으로 구매가 이루어져야 함으로 신규전동차 구매시 최신사양으로 설계하여 주기 바라며, 검수설비중 시험기류는 신규전동차 구매시에 도입가능토록 반영하여 주기 바람

○ 기존전동차 개량은 현재 방송/표시기 장치, 차상신호장치, TCMS등의 개량이 필요한 것으로 파악되나, 현장조사를 철저히 시행하여 누락이 없도록 하여주기 바람.

○ 도시철도공사는 5호선 하남연장 기본설계에 적극 협조하겠음

▢ 회의 결과

○ 기존 5호선 차량의 대폐차 결정시 하남연장 신규전동차 구매 규격서는 최신사양을 최대한 반영하며, 각종 시험기류도 설계에 반영키로 함.

○ 기존 5호선 전동차 기대수명 평가, 차량의 대수선 계획 등의 수립시 공유키로 함.

○ 신규전동차 구매 및 기존전동차 개량 설계시 차량기지 종사원들의 의견을 충분히 검토하여 설계에 반영키로 함.

▢ 향후계획

◌ ‘14.12. : 적용부품 기술검토 및 기존전동차 개량 현장조사 완료

◌ ‘15. 7. : 차량제작규격서 작성완료. 끝.