투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설사업관리용역 설계변경(총차5회 및 5차1회) 및 준공기한 연기 계약의뢰(남부순환로 평탄화공사 건설사업관리용역)

1. 토목부-13493호(2020. 7. 9.)와 관련임.

2. 우리 본부에서 시행중인 “남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차5회, 5차1회)계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

나. 용역기간 : '16. 4.14 ~ '21. 02. 15(5차 ‘20. 1.14 ~ ‘20. 12.31)

다. 용 역 비 : 2,342,800천원(5차 550,000천원)

라. 도 급 자 : ㈜동일기술공사외 3사

마. 설계변경 및 준공기한 연기 내역

- 사유 : 물가변동 제4회 반영 및 감리 인력 투입기간 조정에 따른 설계변경 및 준공기한 연기

- 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총차 (5회)	용 역 비	2,342,800,000	2,342,800,000	변경없음
	용역기간	‘16. 4.14. ~‘21. 2.15.	‘16. 4.14. ~ ‘21. 4.20	증) 2개월
5차 (1회)	용 역 비	550,000,000	550,000,000	변경없음
	용역기간	‘20. 1.14. ~ ‘20.12.31.	‘20.1.14 ~ ‘21.2.25	증) 2개월

붙 임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 관련공문 1부.

3) 변경 내역서 각 1부.

4) 합의서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	박일연		토목부장	07/10 김용제
협조자
시행	토목부-13511	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	lhg2023@seoul.go.kr	/	부분공개(4)