문서번호	급수설비과-4313
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	급수설비과장	급수부장

간선배관 사업 변경에 따른 검토 보고(동부)

2014. 7.

급수부

(급수설비과)

간선배관 사업 변경에 따른 검토 보고 (동부)

2014년 기 승인된 간선배관 공사중 도로굴착 통제 등의 사유로 구간변경 요청된 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		현 황

▢ 간선배관공사 변경 사항

○ 당 초

- 자양동 770번지 일대 간선배관공사

· 공사개요 :  D=150mm L=75m

· 소요예산 :  45백만원

· 취소사유 :  도로굴착 통제 및 일부 사유지 포함되어 취소

- 중곡동 53~54번지간 간선배관공사

· 공사개요 : D=200mm  L=100m

· 소요예산 : 70백만원

· 취소사유 : 세척갱생공사 구간에 포함되어 공사완료

○ 변 경

- 자양동 651-41 ∼ 651-49번지 간선배관공사

· 공사개요 :  D=80mm L=75m

· 소요예산 :  30백만원

· 선정사유 : 노후화된 불량도로 정비사업과 관련한 유관 공사로 노후된 건축물

재건축 공사시행으로 구경확대 (SSP 50mm →DCIP 80mm)

- 중곡동 254-1 ∼ 254-60번지 간선배관공사

· 공사개요 :  D=150mm L=125m

· 소요예산 :  75백만원

· 선정사유 : 주택 밀집지역에 관경 협소로 인한 소출수(DCIP 80mm →DCIP 150mm)

Ⅱ		검토결과

▢ 자양동 651-41 ~ 651-49 번지

○ 골목내 불량도로 정비사업이 추진 예정으로 병행공사 시행되는 구간

○ 골목내 SSP 50mm 부설되어 있으며, 골목내 사용중인 인입구경은 25mm 1개소,

20mm 7개소 임

○ 향후 골목내 재건축(도시형 생활주택) 공사시 구경의 확대가 필요한 구간임

▢ 중곡동 254-1 ~ 254-60 번지

○ 골목내 DCIP 80mm 부설되어 있으며, 골목내 사용중인 인입구경은 25mm 4개소,

20mm 15개소 임

○ 주변 배관망의 형성도 미흡하여 향후 인근지역에 전체적인 배관정비가

필요한 구간임

	< 검 토 결 과 >
☞ 자양동 651-41~ 651-49 일대 간선배관은 불량도로 정비사업과 병행하는 구간으로 이중굴착을 예방하고자, D=80mm L=75m 부설하도록 추진 ▷ 소요예산 : 30백만원 ☞ 중곡동 254-1 ~ 254-60 일대 간선배관은 인근 지역에 대한 배관망과 함께 재 검토하고 향후 정비 계획을 수립하여 시행 ▷ 금회 미시행

○ 예산과목 : 자본적지출 구축물 송배수관정비 시설비 및 부대비 (시설비:간선배관부설)

▢ 간선배관 공사비 재조정 내역

(단위:천원)

구 분	동부 기배정액	변경액	감배정	비 고
급수부	937,000	852,000	85,000

Ⅲ		기타 행정사항

▢ 향후 간선배관 공사 심의전 도로굴착 등 사전조사를 철저히 시행하여 추진

▢ 간선배관 공사비에 대한 목적외 사용되지 않도록 추진하고, 변경사항

발생시 본부에 승인을 득한후 시행할 것

▢ 사업의 변경 및 취소로 인하여 동부수도사업소의 간선배관 공사비 감배정

첨부 : 1. 간선배관 예산 요청 공문 1부.

2. 간선배관 예산 요청사항 검토보고 1부.  끝.