실정보고 검토서

공사명

동부간선도로 확장공사(3공구)

공사개요

· 위 치 : 녹천교~의정부시계

· 규 모 : 도로 확장 4→6차로, L=2.2km

· 공사기간 : ‘08.02.~‘20.12.

· 도 급 비 : 1,075억원

· 시공사 : ㈜세원건설 외1

· 감리단 : ㈜동부엔지니어링 외1

· 설계사 : ㈜동일기술공사

실정보고 건명

3-2구간 방음벽 설치공사 정산 실정보고

실정보고

사유

- 민원으로 인한 추가 시설물(상일보도육교, 측벽 상부, 용마루 마감 등)

- 시설관리공단 요청사항 반영(CCTV 및 VMS 점검구 설치)

형식 변경(기초 플레이트, 브라켓, 하부 지지구조 등) 반영

실시공 물량(안전시설물, 옹벽, 방음벽 등) 정산 등

건설사업관리단

검토의견

- 민원 처리, 관리기관 요청, 변경 현황보고 등을 반영하여

실시공 물량으로 정산하는 것이 타당함.

공기에 미치는 영향

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
금액	28,189,887천원	28,153,774천원	감)35,113천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 ( ○ )

당초 사업비 범위내 시행가능 (    )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

특이사항 없음

발주처

검토의견

건설사업관리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

비 고

동삼감 제2020-170호(2020.06.29.)

결재

담당

권해엽

과장

장종환

부장

07/27

김용제