문서번호	설비부-11089
결재일자	2020.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양성옥		여인웅	07/29 이달영
협조

「딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역」

준공기한 연기 검토 보고

2020. 07.

도시기반시설본부

[설비부]

「딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역」

준공기한 연기 검토 보고

『딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역』의 준공기한 연기를 검토하여 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역

용역기간 : 2019.1.16. ~ 2020.9.20.

계약금액 : 금3,184,400원

계약업체 : ㈜다산엔지니어링

Ⅱ		검토내용

준공기한 연기 사유

□ 소방(전기)공사 계약기간 연장에 따른 감리용역 계약기간 연장

변경 내용

□ 딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역

구 분	당초	변경	증⦁감	비고
계약금액	**********	**********	****
계약기간	*********************	*********************

귀책소재 : 발주처

지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		검토결과

딜쿠샤 원형복원 소방(전기)공사 계약기간 연장으로 인한 감리용역 계약기간 연장 요청을 검토한 결과

딜쿠샤 원형복원공사 소방(전기)감리용역의 계약기간 연장이 타당하다고 판단되어, 총무부에 계약기간 변경을 요청하고자 함.

붙임 : 용역사 공문 1부.  끝.