문서번호	건축부-13207
결재일자	2020.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		의료시설과장		건축부장
장도영		차무흥		08/04 代유현수
협 조
	주무관				박진국
	주무관				김재호

『동북권 세대융합형 복합시설 건립공사』 예비준공검사 시행계획

2020. 8.

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『동북권 세대융합형 복합시설 건립공사』

예비준공검사 시행계획

「동북권 세대융합형 복합시설 건립공사」의 준공가능 여부와 공사 미진 사항을 사전에 보완하고자 예비준공검사를 시행하고자 함

(※ 준공기한 : ‘20.9.24)

1		공사개요

○ 위    치 : 도봉구 마들로 13길 84 (창동 1-8)

○ 공사개요 : 지하2층/지하5층, 연면적 17,744.60㎡, 신축

○ 공사기간 : ‘18. 6. 28. ~ ‘20. 9. 24. (현재 공정율

○ *****************

○ 시 공 자 : ㈜윤익건설 외 2개사

○ 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		추진경위

○ ‘16.04 : 창동·상계 신경제중심지 세대융합형 복합화사업 추진계획 수립(주택건축본부 주택정책과)

○ ‘16.10 : 창동·상계 신경제중심지 조성을 위한 세대융합형 복합화사업 세부추진계획(지역발전본부 동북권사업과)

○ ‘17.07 : 설계용역 계약 및 착수(설계준공 ’18.05)

○ ‘18.06 : 공사계약 및 착공

○ ‘18.12 : 설계변경에 따른 공사기간 연장(‘20.6.27. ⇒ ‘20.9.24.)

3		예비준공검사계획

□ 관련규정

○「건설기술진흥법 시행령」제78조제2항

○「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제74조제5항

○ 예비준공검사 실시 개선계획[행정2부시장 방침 제27호(’14.2.6.)]

□ 예비준공검사 실시

○ 점검일시 : 2020.8.14(금) 14:00(※현장 및 참석자 여건에 따라 조정·변경)

○ 점검자

- 외부 위원

· 건축분야 : 외부전문가 2명(설계변경자문위원회 자문위원)

· 기계·전기분야 : 설비부 추천 위원 2명

- 도시기반시설본부 : 의료시설과장, 건축부(시설6급 박진국, 시설7급 김재호), 건축부 공사관리관, 설비부(기계·전기·통신·소방) 공사관리관

(※ 조경분야 향후 별도 시행)

○ 입회자

- 사업의뢰부서 및 운영관리부서

- 건설사업관리단 분야별 감리자(상주 및 비상주 감리원)

- 분야별 시공사 현장대리인

□ 주요 점검내용

○ 공사내용 중 미비한 사항 사전보완

○ 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

○ 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

○ 기타 예비준공검사 시행 목적에 부합한 사전점검 및 확인 등

□ 지적사항 조치

○ 예비준공검사에서 지적된 사항은 준공검사 전까지 보완·조치 후 서면보고

○ 해당사항은 준공전 설계도서 등에 반영하고 준공검사시 감리자 확인·검토를 통해 준공처리

4		행정사항

□ 외부 점검위원 수당 지급

○ *********************

○ 지급방법: 개인별 은행계좌 입금

○ 예산과목: 복지정책실 인생이모작지원과, 인생이모작지원 기반마련, 은퇴후 제2인생 설계지원, 50+캠퍼스확충, 시설부대비(401-03)

붙임  1) 예비준공검사 조서 및 결과서(양식) 1부.

2) 지적사항 조치결과 보고서(양식) 1부.  끝.