문서번호	설비부-11519
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양성옥		여인웅	08/05 이달영
협조

「딜쿠샤 원형복원 정보통신공사」

실정보고 사항 검토 보고

2020. 08.

도시기반시설본부

[설비부]

「딜쿠샤 원형복원 정보통신공사」

실정보고 사항 검토 보고

『딜쿠샤 원형복원 정보통신공사』의 실정보고 사항을 검토하여 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 :『딜쿠샤 원형복원 정보통신공사』

공사위치 : 서울특별시 종로구 사직로2길 17 딜쿠샤

공사기간 : 2018.11.19.~ 2020.11.30.

공사내용 : 통합배선공사 1식, CCTV공사 1식 등

도 급 비 : 39백만원

시 공 사 : ㈜성우아이씨티

Ⅱ		검토내용

관련근거

□ 예쓸-200203호(2020.02., 설비분야 공정회의록)

□ 역사문화재과-7644호(2020.04.16., 설계변경 요청)

실정보고 사유 및 검토내용

*******************************************

*******************************************

************************************

******************************************

*******************************

************************************

******************************

*******************

공사비 변경 세부현황                                     (단위: 원)

구 분	내용	금 액
		당 초	변 경	증·감
********	***************************** ************** ****************	**********	**********	**********
******	***************	*********	*	**********
*********	************** **************	*********	**********	*********
******	***************** ***********	*	*********	*********
*****		**********	**********	*********
*****		**********	**********	*********
********		**********	**********	*********

공사비 변경 사항                                         (단위: 원)

**	**	****
**********	**********	***********

단가 검토

□ 증가된 공사량의 단가는 기존 계약단가 적용

□ 신규항목에 대해서는 신규단가에 낙찰률 적용

Ⅲ		검토의견

시공사에서 제출한 실정보고 사항을 검토한 결과 공정회의, 의뢰부서 요구사항, 현장 상황에 따른 변경사항 반영이 적절한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고자 하며, 물량 및 단가에 대한 적정성을 종합적으로 검토하여 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임 : 실정보고(시공사) 1부.  끝.