문서번호	토목부-15278
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목총괄과장	토목부장
강대호	진재섭	08/05 김용제

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사 매립폐기물층 H파일 및 PHC파일 천공방안 검토보고

2020.  8.

도시기반시설본부

(토목부)

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사

매립폐기물층 H파일 및 PHC파일 천공 방안 검토 보고

가시설용 H-파일 설치를 위한 지반천공 작업이 매립폐기물 구간에서 오거비트에 의한 작업효율이 급격히 떨어짐에 따라 이에 대한 개선방안을 검토 보고코자 함.

□ 검토 배경

○ 본 공사 지하차도 시공시 흙막이 가시설용 H-File 설치를 위한 천공을 전용천공기에 오거비트를 이용하여 작업을 하던중,

○ 매립폐기물층 천공작업 효율이 극격하게 떨어지고 지반보강 기초말뚝(PHC 파일) 천공시에도 작업효율에 떨어질 것으로 예상됨.

○ 이에따른 공정지연 등 우려됨에 따라 대책방안 마련 필요

※ 관련문서 : 매립폐기물층 파일천공 개선방안 보고(제2자유입건 2020-304호)

□ 사업 개요 (공정율 : 21.2%, 가시설용 H파일 및 복공판 설치중)

○ 위  치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리 일대

○ 규  모  : 지하차도 신설 (폭 4차로, 연장 540m)

○ 사업기간 : 2019. 08. 01. ~ 2022. 01. 29.

○ 총공사비 : *****************************************

○ 계약현황

구 분	시설 공사	감리 용역	비 고
계약상대자	삼부토건(주) 외 2개사	동부엔지니어링 외 2개사	****************** ************
*****	****************	***************
계약 기간	‘19.08.01.〜’22.01.29.	’18.11.30. ∼ ’21.06.29.

지하차도 신설

도로확폭 : 1개차로 총582m

□ 추진 경위

○ 2019.08.01. : 시설공사 계약 및 착수

○ 2020.04.30. : 교통섬 철거 및 지장물 이설 완료

○ 2020.05.18. : 가시설 H-Pile 천공 및 항타 작업

- *****************************

○ 2020.06. 말 : 교차로구간 가시설 H-Pile 천공

- *******************

○ 2020.07.09. : H-Pile 천공개선방안 회의

- (참석 7명) : **********************

- (주요내용)

․가시설은 각종지장물 저촉 및 버팀의 안전성 등을 위해 ***********보다는 ****************** 가장 적절함.

․******이 깊어 치환 또는 ***** ****** 등의 지반보강보다는 암반층에 직접 지지하는 ******** 추진 적절함.

․다만, ****의 작업능률 향상을 위해 타입방식 또는 마력수 증강, 장비추가 등이 필요.

○ 2020.08.03. : 매립폐기물층 파일천공 개선방안 보고

※ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- ****은 기계적 한계로 인하여 **************한 것으로 판단되므로 에어콤프레샤의 고압압축공기 효과를 얻을 수 있는 **************로 교체하는 방안을 적용코자 함.

- 공사비 검토는 향후 실정보고 제출 시 상세히 검토하여 보고예정이며, 원활한 공정추진을 위해 우선 시공이 필요한 것으로 판단됨.

□ 보고 내용

○ 가시설 H-Pile 및 PHC말뚝 천공작업, ***************

- 본 공사 가시설용 H-Pile(Ø500mm) 설치를 위한 천공을 오거비트를 이용하여 지반을 천공하던 중,

- 매립폐기물층 작업시 ******************************** 하는 등 작업 속도가 현저히 떨어짐.

☞ 일일 작업량 및 소요기간 비교표

구 분			일일 작업량	소요기간	비고
당 초 작업(계획)시	H-Pile	1,168본	6∼8 공	5.7 개월	※ PHC 파일 공정관리계획상 작업량
	PHC파일	803본	9 공	3.0 개월
매립층 천공	H-Pile	606본 (총 1,168본)	1∼1.3 공	16.8 개월 (19.5 개월)
	PHC파일	803본	0.9공	29.7 개월

○ 천공 작업 효율 저하에 따른 공기 지연 예상

- H파일 총 1,168공 중 606공과 PHC파일 803공이 매립폐기물층에 천공해야 하는 수량으로써,

- 기정 설계된 오거스크류를 이용하여 천공작업을 할 경우 **************됨.

☞ H-Pile 천공 :  418일,  PHC파일 천공 : 800일 ⇒ 총800일

※ H-Pile 및 PHC 파일 천공 동시 시공

※ 지하차도 종단면도

□ 대책 방안

○ 천공 방법을 오거비트⇒ **************.

- 일일 작업량 : ******************************

○ *************하여 일일 천공 작업량을 높이고자 함.

○ 매립폐기물층 지반의 지반천공을 위한 효율적인 방안(장비 및 공법 등)을 지속 모색코자 함.

※ 천공비트 변경에 따른 신규단가는 시공사 협의중이며 향후 실정보고시 상세히 검토하여 보고 예정

붙임  건설사업관리단 보고에 따른 검토보고 1부.  끝.