2020년 자치구 주택가 공동주차장 사업 현황

사업명	공사 규모	사업비(예산)	설계 기간	공사 시행(예정)일	자치구 담당자
50+동부캠퍼스 복합시설내 공영주차장 건설	149면	총사업비 9,083백만원 (국비 2,000, 시비 4,250, 구비 2,833백만원)	’18.11.~’20.10.	’20.9. 발주 예정	도시기반시설본부 홍정희(3708-2654)
인수동 주택가 공동주차장 건설	152면	총사업비 12,555백만원 (시비 8,789, 구비 3,766백만원)	’18.6. ~ ’19.4.	’20.8. 발주 예정	강북구 류혜림 (901-5352)
남현공원 지하주차장 건설	100면	총사업비 12,738백만원 (시비 6,488, 구비 6,250백만원)	’18. 7. ~’19.12.	’20.6. ~’21.12.	관악구 정주현 (879-6909)
역삼문화공원 지하주차장 건설	247면	총사업비 23,256백만원 (시비 4,391, 구비 18,865백만원)	’17. 9. ~ ’18.12.	’19.10. ~ ’21.8.	강남구 조명철 (3423-6392)
동명근린공원 지하주차장 건설	181면	총사업비 20,983백만원 (시비 8,486, 구비 12,497백만원)	’19.2. ~ ’20.8.	’20.10. 발주 예정	강동구 문주상 (3425-6305)
염리2구역 기부채납부지 공영주차장 건설	125면	총사업비 15,431백만원 (시비 4,708, 구비 10,723백만원)	’18.1. ~ ’19.6.	’19.8. ~’21.6.	마포구 김성현 (3153-9612)
삼선동1가 공영주차장 증축	134면	총사업비 12,171백만원 (시비 4,456, 구비 7,715백만원)	’19.10.~ ’20.5.	’20.7.~’21.12.	성북구 강윤근 (2241-3415)
부암동 주택가 공동주차장 건립	28면	총사업비 7,635백만원 (시비 2,140, 구비 5,495백만원)	’19.6. ~ ’20.8	’20.9. ~ ’21.9.	종로구 신영환 (2148-3343)
중곡3동 배나무터 공원 공영주차장 건립	104면	총사업비 9,576백만원 (국비 2,000 시비 4,546, 구비 3,030백만원)	’19.12. ~ ’20.8.	’20.11.~’21.12.	광진구 백승민 (450-7958)
송정동 공공복합청사 건립지원	106면	총사업비 6,545백만원 (시비 8,789, 구비 3,766백만원)	’20. 1. ~ 9.	’21.1. ~ ’23.1.	성동구 김현정 (2286-5716)
신창초등학교 지하주차장 건립	100면	총사업비 7,384백만원 (시비 4,430, 구비 2,954백만원)	’20.7.~ ’21.7.	’21. 11.~ ’23.10.	도봉구 장영주 (2091-4215)
등서초등학교 지하주차장 건립 지원	32면	총사업비 2,859백만원 (시비 1,656, 구비 1,203백만원)	’19. 1. ~ 7.	’20.1.~ ’21.4.	강서구 김동훈 (2627-2172)
뚝섬유수지 공영주차장 건립	425면	총사업비 17,230백만원 (국비 8,547 시비 5,210, 구비 3,473백만원)	’20. 5. ~ 9.	’20. 10. ~ ’21. 9.	성동구 김현정 (2286-5713)
양천중학교 건립	143면	총사업비 13,637백만원 (국비 2,375 시비 6,125, 구비 4,337백만원, 기타 800)	’20.9. ~ ’21.4.	’21. 6. ~ ’22.12.	양천구 김정호 (2620-3736)
중화1재정비구역 공원 지하주차장 건립	104면	총사업비 7,111백만원 (국비 2,000 시비 3,067, 구비 2,044백만원)	’20. 9. ~ ’21.3.	’21. 5.~ ’22. 12.	중랑구 최정환 (2094-2654)
양재공영주차장 건립	178면	총사업비 21,638백만원 (시비 2,000, 구비 19,638백만원)	’19.6. ~ ’20.5.	’20. 9.~ ’21.12.	서초구 유미화 (2155-7290)
삼전근린공원 공영주차장 건립	204면	총사업비 17,800백만원 (국비 2,000 시비 6,600, 구비 9,200백만원)	’19.5. ~ ’20.4.	’21. 1.~ ’22.12.	송파구 김완선 (2147-3198)
낙산근린공원 주차장 건립	112면	총사업비 18,052백만원 (시비 17,782, 구비 270백만원)	’20.9. ~ ’21.7.	’21.7. ~ ’23. 5.	종로구 신영환 (2148-3343)