투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[서울의료원 권역응급의료센터 전기공사(총차,1차)]

1. 설비부-12577(2020.8.25.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 「서울의료원 권역응급의료센터 전기공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서울의료원 권역응급의료센터 전기공사(총차,1차)

나. 계 약 자: ㈜ 엔큐 대표 정석용

다. 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	2019. 3. 26. ~ 2020. 9. 25.	2019. 3. 26. ~ 2021. 7. 30.	증)308일
1 차	2019. 3. 26. ~ 2020. 8. 31.	2019. 3. 26. ~ 2020. 12. 30.	증)121일
도급비	총차 : 금 1,338,419,940원 1차 : 금 700,000,000원	변경없음

라. 예산과목: 시민건강국 보건의료정책과, 공공보건 의료분야 대시민 서비스 수준 향상, 공공의료기관 관리 및 운영 개선, 서울의료원 응급의료센터 건립, 시설비

마. 변경사유: 추가증축 관련 선행공정(건축) 공기연장에 따른 후속공정 공기연장

붙임  1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 계약서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희준		건축설비과장	김은덕		설비부장	08/26 이달영
협조자
시행	설비부-12607	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	gogold79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)