문서번호	설비부-12717
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	08/27 이달영

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2020. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재 납품기한 연장 검토보고

건설사업관리단으로부터 제출된『서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사』의 관급자재 및 T.A.B 용역 연장 실정보고를 검토하고 보고드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사

○ 위    치 : 서울시 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상3층, 연면적 3669.62㎡, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : ´19.04.08.~´20.10.07.

○ 공 사 비 : *********************

○ 도 급 사 : 덕신건업㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

2		관련근거

○ 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사 관급자재 납품기한 연장 검토보고 (동일감리 제20-199호, 2020.08.19.)

3		검토내용

○ 납품기한 연장 사유

− 사업의뢰부서의 추가 증축 요청에 따른 선행공정(건축) 준공 연기로 기계공사 관급자재 5건 및 T.A.B. 용역의 납품기한을 연장하고자 함.

○ 납품기한 연장 내용

구분	품명 (계약번호)	계약자	계약금액(원)	납품기한
				변경전	변경후
관급 자재	냉난방기 (00198151203)	삼성전자㈜	**********	`20.09.30.	`21.07.30.
	엘리베이터 (00186052006)	그린엘리베이터㈜	***********	`20.10.07.	`21.07.30.
	공기조화기 (12192040900)	㈜에스앤에이치 이엔지	***********	`20.09.30.	`21.07.30.
	자동제어 (1219043700)	이에스콘트롤스㈜	***********	`20.09.30.	`21.07.30.
	지열시스템 (12192047700)	㈜에너솔라	***********	`20.08.31.	`21.07.30.
용역	T.A.B 용역 (201906115E6-00)	㈜삼우엠이피 컨설턴트	**********	`20.10.30.	`21.07.30.

○ 건설사업관리단 검토내용

− 『서울의료원 권역응급의료센터 증축공사』 준공기한이 연장됨에 따라 냉난방기 구매설치 외 5건에 대하여 납품기한 연장함이 적정함.

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단이 제출한『서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사』의 관급자재 등 납품기한 연장 실정보고를 검토한 결과가 적정하여 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 실정보고서 및 합의각서 각 1부.  끝.