〈서식 1〉

지역교통안전환경개선사업 추진현황(서울시)

□‘20년 신규사업 추진현황

ㅇ 추진현황 및 계획(‘20. 8. 30. 기준)

- ‘20년 사업 40개소 중 설계중 1개소, 공사중 39개소

- 사업예산 3,371백만원 269백만원 집행(집행률 8.0%)

- 9월 중 333백만원 집행 예정(예산대비 9.9%)

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘20.8.30.기준)		집행전망
	집행현황		계	9.15	9월말	10월말	11월말	비고
	예산액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
계	3,371	269	2,392	333	838	1,720	2,392
교통사고 잦은 곳	3,231	269	2,272	333	838	1,640	2,272
회 전 교 차 로	140	-	120			80	120

□ 19년 이월사업 추진현황

ㅇ 추진현황 및 계획(‘20. 8.30. 기준)

- 이월사업 5개소 중 설계중 1, 준공 4개소

- 이월예산 307백만원 중 189백만원 집행(집행률61.6%)

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘20. 8.30 기준)		집행전망
	집행현황		계	9.15	9월말	10월말	11월말	비고
	이월액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
계	307	189	298	189	189	298	298
교통사고 잦은 곳	198	189	189	189	189	189	189
회 전 교 차 로	109	-	109	-	-	109	109

〈서식 2 : 2020년 신규사업〉

2020년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

【교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 오상준,손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행 실적

✳ 기준일 : 2020. 8. 30. (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계	3,371	1,811	269	8.0%
교통사고 잦은 곳	3,231	1,671	269	8.3%
회전교차로	140	140	-	-

□ 추진현황

✳ 기준일 : 2020. 5. 30 (단위 : 개소)
구분	계	계획 수립	실시설계			사업시행
			설계 발주	설계중	설계 완료	관계 기관 협의	행정 예고	일상 감사	계약 심사	사업 발주	공사중	준공
계	40			1							39
교통사고 잦은 곳	39										39
회전교차로	1			1

○ 교통사고 잦은 곳

- ‘19. 2. ~ ‘20. 3. : 실시설계 (떡전교 교차로 등 39개소)

- ‘20. 3. ~ 4. : 유관기관 협의 및 예산 재배정 완료

- ‘20. 5. ~ 12. : 사업시행 및 준공

○ 회전교차로

- ‘20. 3. ~ 6. : 실시설계 (은평구 롯데캐슬 등 2개소)

- ‘20. 4. : 교통규제심의 요청(은평구 롯데캐슬 등 2개소)

* 은평구 롯데캐슬 : 어린이 보호구역으로 가칭 민식이법에 따라 회전교              차로에도 신호등설치 필요 등으로 부결됨(5.14 은평경찰서)

* 종로구 충신시장 교차로 : 주민의견 수렴 진행중이나 코로나로 지연

- ‘20. 6. ~ 9. : 유관기관 협의 및 예산 재배정

- ‘20. 9. ~ 12. : 사업시행 및 준공

□ 집행 전망

✳ 기준일 : 2020. 5. 30기준 (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	집행 현황			향후 집행전망					집행률 (B/A)
	예산액	교부액	집행액	계	9.15	9월말	10월말	11월말
계	3,371	1,811	269	2,392	333	838	1,720	2,392	71.0
교통사고 잦은 곳	3,231	1,671	269	2,272	333	838	1,640	2,272	70.3
회전교차로	140	140	-	120	-	-	80	120	85.7

〈서식 3 : 2019년 이월사업〉

2019년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 오상준,손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행실적

✳ 기준일 : 2020. 8. 30                                                  (단위 : 백만원, 국비기준)

사 업 명	′19년				′20년
	예산	집행액	이월액	불용액	이월액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
교통사고 잦은곳 개선	2,967	2,179	198	590	198	189	95.4%
회전교차로	140	31	109	-	109	-	-

□ 추진현황

○ 교통사고 잦은 곳

- ‘18. 11. ~ : 실시설계 시행(국기원교차로 등 4개소)

- ‘19. 3. : 교통안전시설물 심의 완료

- ‘19. 6. : 예산 재배정 및 사업시행

- ‘20. 6. : 준공

○ 회전교차로

- ‘19. 2. ~ : 설계용역 계약 및 착수 (강서구 장하촌앞)

- ‘19. 2. ~ : 기본설계 및 자문(koti) 요청

- ‘19. 8. ~ 10. : 교통안전시설물 심의

- ‘19. 10. ~ : 실시설계 용역 시행

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 교통사고 잦은 곳

- 지장물 이설 유관기관 협의 지연으로 이월

- 동절기 굴착통제 기간 이후(‘20.3월) 착공하여 ’20.6월 준공

○ 회전교차로

- 2개의 교차로가 인접되어 있는 형태의 초소형 회전교차로 설치를 위한 전문가 자문(koti), 지장물 이설 유관기관 협의 지연으로 이월

- 20년 대가 반영, 보완설계를 위하여 실시설계 용역 20년 9월 완료

- 개선대상 지점은 실시설계 완료 후 집행 예정

□ 집행 전망

✳ 기준일 : 2020. 8. 30기준 (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
	이월액	집행액	계	9.15	9월말	10월말	11월말
계	307	189	298	189	189	298	298	97.1
교통사고 잦은 곳 개선	198	189	189	189	189	189	189	95.5
회전교차로	109	-	109			109	109	100