문서번호	토목부-14163
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
김구		07/23 노우성
협조
	주무관		양준식

구룡지하차도 집수정 외부출입구 규격 변경보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

구룡지하차도 집수정 외부출입구 규격 변경 보고

구룡지하차도 집수정은 외부출입구가 돌출형 구조물로 되어 있으나 인근 인근지역 주민들이 시야확보 침해를 이유로 구조물 규격 축소를 요구하고 있어 규격 변경방안에 대해 검토하고 보고드림

관련근거

❍ 동기강 2014-131호(`14.6.26.) 구룡지하차도 집수정 출입구 변경 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13.5.9.~`14.9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1,   ❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고내용

❍ 보고내용

- 구룡지하차도 집수정 외부출입구 구조물에 대해 인근지역 주민들로부터 시야확보 침해를 받고 있으니 구조물의 규격 축소와 공사기간 단축을 요구함.

- 구룡지하차도 집수정 구조물의 규격 축소에 따른 원설계자, 기술지원감리원 검토와 관련부서 협의 결과 기능성과 구조상 문제가 없어 규격 변경은 적정

❍ 변경 현황도

당 초	변경

❍ 물량 변경 현황

구 분		단위	당 초	변 경	증 ･ 감	비고
구조물	폭	m	6.42×4.22	5.22×4.22	1.2
	높이	m	12.8	11.8	1.0
가시설	버팀보	본	27	18	9
	사보강	개소	18	24	6
	잭	개소	21	9	12
	강재토류판	㎡	274	366	92

❍ 공사비 증･감 현황                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1. 구조물	81,207	68,530	12,677
2. 가시설	64,762	68,615	3,853
3. 직접공사비	145,969	137,145	8,824
4. 제경비	49,213	42,128	7,085
5. 합 계	195,182	179,273	15,909
6. 부가세	19,518	17,927	1,591
총 공 사 비	214,700	197,200	17,500

조치계획

❍ 감리단 검토의견에 따라 추후 설계변경하여 도급비에 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.