투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(광나루 어린이야구장 조명설치 공사)

1. 공원시설과-3155호(2020.8.26)와 관련입니다.

2.「광나루 어린이야구장 조명설치 공사」와 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광나루 어린이야구장 조명설치 공사

나. 계약업체 : 센트로건설(주) 대표 : 이정훈

다. 계약금액 : 금60,456,460원(금육천사십오만육천사백육십원)

라. 준공기한 변경내용

- 당    초 : 2020. 6. 23. ~ 2020. 9. 15.

- 변    경 : 2020. 6. 23. ~ 2020. 10. 31.

- 변경사유 : 조명탑 및 관로매설 구간이 국가지정문화재(풍납토성) 구역 및 구역 주변 100m 이내 포함되어 관련 법령에 의거 문화재청 승인 후 해당지역 시굴조사 명령에 의해 준공기한을 연기하고자 함.

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임  1. 방침서  1부.

2. 준공기한 연기의뢰서  1부.

3. 합의각서  1부. 끝.

	공원시설과장
주무관	현병철		공원시설과장	09/11 최연호
협조자
시행	공원시설과-3503	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과	/
전화	02-3780-0861	/전송	02-3780-0745	/	qudcjf8441@seoul.go.kr	/	부분공개(7)