11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 00시에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명 (투자심사 당시 사업명)	총사업비 (투자심사 당시 사업비)	2012년까지 집행사업비 (집행액)	2013년 소요사업비 (‘13년도 예산서기준)	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%) (‘13년도 말 기준 집행액 x 100/총사업비)
IT COMPLEX 건립	306,410	82,676	30,019	90,605	2015	2011	36.7

‣ 대상사업 : 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

- 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

‣ 총사업비는 투융자심사 당시를 기준으로 작성하고, 변경이 있는 경우 ‘사업변경내역’ 란에 당초와 현재를 구분하여 적고 사유를 간략히 기재

‣ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재

‣ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사”사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시

개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

IT COMPLEX 건립

담당자

정보기획담당관 엄기문(☎2133-1875)

□ 사업목적 및 필요성

○ DMC 단지내 우수한 IT 기술과 문화콘텐츠, 디지털미디어 산업역량을

집약한 국제적인 랜드마크 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009.4 ~ 2015.10

○ 위 치 : 마포구 상암동 DMC E3-3블럭

○ 규 모 : 총면적 : 81,969㎡(지상21/지하7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 306,410백만원

( 공사비 203,300백만원, 운영장비등(입주부서별도편성) : 103,110백만원)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	203,300	82,676	30,019	30,000	60,605
국 비	16,000	16,000	-	-	-
시 도 비	187,300	66,676	30,019	30,000	60,605
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도(공정률) : 62%)

○ 현재(2014.7월) 공정률 : 62%

○ 2015.10월 준공을 위한 최종예산 확인중

□ 향후계획

○ 2015.10 입주실시( 교통방송, e-Sports경기장, 데이터센터 등)

○ 2016. 3 운영개시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 최초 시비예산사업에서 e-Sports경기장확대 및 운영장비비 추가로 사업비증가

[ 최초(162,902백만원)⇒ 변경(306,410백만원) ]