등록번호

사회복지과-29665

★주무관

장애인정책팀장

사회복지과장

복지문화국장

등록일자

2020.9.22.

이자영

김형철

이나령

09/22

송광덕

결재일자

2020.9.22.

공개구분

부분공개(5)

협  조

- 올해피 장애인복지센터 -

보수 및 비상구 설치 공사 연장 계획

서 대 문 구

사회복지과

- 올해피 장애인복지센터 -

보수 및 비상구 설치 공사 연장 계획

장애인복지사업을 위해 사용 및 관리하고 있는 올해피 장애인복지센터 건물 미흡점을 보완하기 위한 공사를 시행함에 있어 우천기간이 길어져 부득이 공사 기간을 연장하여 준공에 차질이 없도록 함.

Ⅰ		공사 연장개요

계약내용

◦ 계약건명 : 올해피 장애인복지센터 보수 및 비상구 설치공사

◦ 계약업체 : ㈜대일건설산업 주식회사

◦ 계약금액 : 19,800천원

◦ 공사기간 : 2020. 8. 25. ~ 2020. 9. 22. (29일)

연장내용

◦ 준공기한 : 당초 2020. 9. 22.  ⇨  변경 2020. 10. 6. (연장 14일)

◦ 귀책소재 : 발주부서(사회복지과) ※ 계약상대자 지체상금 부과 없음

◦ 연기사유

- 공사기간 29일 중 17일이 우천으로 인해 외부공사 시행에 어려움

- 우천 시에는 내부공사(비상구 설치)를 시행하였으나 배관, 옥상방수 공사는 외부공사로 우천으로 인해 공사 지연

Ⅱ		올해피 장애인복지센터 보수 및 공사개요

공사개요

◦ 공 사 명 : 올해피 장애인복지센터 보수 및 비상구 설치 공사

◦ 위    치 : 서대문구 세검정로 78-19(홍제동 279-30)

◦ 건축규모 : 대지면적 273㎡, 연면적 598.45㎡, 지하1층/지상3층

◦ 공사기간 : 2020. 8. 25.  ~ 9. 22.

◦ 총공사비 : 19,800천원

◦ 공사내역

- 배관공사(건물 뒤 주차장 오․하수 배관) : 노후화된 오․하수 배관 교체

- 방수공사(건물 옥상) : 옥상 우레탄 방수 실시

- 지하 강당 비상구 설치

Ⅲ		공사 연장 세부계획

계약내용

◦ 계약건명 : 올해피 장애인복지센터 보수 및 비상구 설치 공사

◦ 계약업체 : ㈜대일건설산업주식회사(대표 진성욱, ☎02-337-3084)

◦ 계약금액 : 19,800천원(수의계약)

◦ 계약일자 : 2020. 8. 24.

공사 추진현황

◦ 2020. 8. 24.     올해피장애인복지센터 보수 및 비상구 설치공사 계약체결

◦ 2020. 8. 25. ~ 8. 26.	가설공사

◦ 2020. 8. 26. ~ 8. 31.     비상구철거공사

◦ 2020. 9. 1. ~ 9. 2.        배관이설공사

◦ 2020. 9. 3. ~ 9. 10.       비상구제작 및 창호설치

◦ 2020. 9. 19.  ~ 9. 24.    옥상방수공사

공사 연장내용

당초 2020. 8. 25. ~ 2020. 9. 22. (29일)

변경 2020. 8. 25. ~ 2020. 10. 6. (43일)

◦ 공사기간

◦ 연기사유 귀책소재 : 발주부서(사회복지과)

- 공사기간 29일 중 17일이 우천으로 인해 외부공사 시행에 어려움

- 우천 시에는 내부공사(비상구 설치)를 시행하였으나 배관, 옥상방수 공사는 외부공사로 우천으로 인해 공사 지연

◦ 지연상금 부과여부 : 미부과

- 지방계약법 시행령 제90조 제1항 단서‘계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었을 때’는 계약상대자에게 지체일수에 대한 지연배상의무가 없음

추진일정

◦ 2020. 9. 22. ~ 9. 29.	정화조배관공사

◦ 2020. 10. 5.                준공청소

◦ 2020. 10. 6.                준공검사

Ⅳ		향후계획

연장기간 내 공사완료 철저 추진

◦ 공사연장 기간 내 차질 없이 공사완료토록 업체 감독 및 독려 실시

붙임 1. 공사연장 요청공문 1부(공사업체).

2. 수정 공정표 1부.

3. 계약보증금 지급 확약각서 1부.

4.  기간 연장에 대한 합의 각서 1부.  끝.