문서번호	정수시설과-3037
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		백상희	09/22 신동호
협 조
	주무관			류혜영
	주무관			김금옥

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

“3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사”

설계변경 정산 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  9.

강북아리수정수센터

“3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사”

설계변경 정산 계획보고

3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사가 완료되어 다음과 같이 설계변경 및 정산 시행하고 준공처리코자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 건     명 : 3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사

□ 사업개요

○ 모터, 감속기(1.5KW*4p*1/2065) 6대 교체설치

○ 기타 부속기기 6대 교체 설치

□ 계약금액 : 금77,276,120원

□ 계약업체 : ㈜세기엔지니어링

□ 사업기간 : 2020. 8. 10 ~ 2020. 9. 28

Ⅱ		설계 변경 내용

□ 주요 변경 내역

◯ 작업 물량 변경 없음

◯ 제경비 정산

연번	변경사항	당초	변경	증․감
1	산업안전관리비 정산	2,012,085	940,000	감)1,072,085
2	건강보험료, 연금보험료, 노인장기보험료 자료 제출치 않아 감액	1,019,326	0	감)1,019,326
3	일반관리비, 이윤 요율에 맞게 적용	5,827,174	5,367,567	감)459,607
계				감)2,551,018

□ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	44,850,000	44,850,000	-
	노무비	13,463,323	13,463,323	-
	경 비	6,918,961	4,827,550	감)2,091,411
	소 계	65,232,284	63,140,873	감)2,091,411
일반관리비		3,913,937	3,788,452	감)125,485
이 윤		1,913,237	1,579,115	감)334,122
고재처리		-808,440	-808,440
공급가액		70,251,018	67,700,000	감)2,551,018
부가세		7,025,102	6,770,000	감)255,102
총공사비		77,276,120	74,470,000	감)2,806,120

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	70,251,018	67,700,000	감)2,551,018
부가가치세	7,025,102	6,770,000	감)255,102
총공사비	77,276,120	74,470,000	감)2,806,120

Ⅲ		조치계획

□ 상기와 같이 물량 증감 없고 제경비 정산 만 시행하므로 설계변경 심의위원회 개최를 생략하고 재계약, 준공 처리코자 함.

붙   임 : 1. 설계변경내역서(안)  1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

3. 산업안전관리비 검토 결과서  1부.

4. 고용, 산재보험료 완납 증명서  1부.  끝