□ 폭염에 따른 공사 중지, 계약기간ㆍ금액 조정 현황

ㅇ `17.8월

건설공사 발주기관명	전체현장 (개)	공사중지현장 (개)	계약기간‧금액 조정 현장(개)	계약기간 증가 내역 (일, 시간)	계약금액 증액 내역 (원)	취합기관
총계	256	39	1	34	0	서울특별시
상수도사업소 본부 및 산하 수도사업소	217	5	1	34	0
서울주택도시공사	39	34	0	0	0

ㅇ `18.7~8월

기관명	전체현장 (개)	공사중지현장 (개)	계약기간‧금액 조정 현장(개)	계약기간 증가 내역 (일)	계약금액 증액 내역 (원)	취합기관
총계	799	127	80	921	460,986,445	서울특별시
서울특별시(본청)	54	4	4	69	0
도시기반시설본부	67	32	30	70	423,850,941
상수도사업소 본부 및 산하 수도사업소	246	9	5	105	0
영등포소방서	1	1	1	10	0
송파소방서	2	1	0	7	0
중부공원녹지사업소	11	7	8	123	0
데이터센터	1	1	1	8	0
강서구	56	14	14	280	0
서대문구	4	4	4	81	0
성북구	8	1	1	31	0
은평구	5	1	1	5	0
중랑구	23	7	1	47	0
서울교통공사	277	6	6	71	8,005,000
서울주택도시공사	44	39	4	14	29,130,504

ㅇ `19.7~8월

기관명	전체현장 (개)	공사중지현장 (개)	계약기간‧금액 조정 현장(개)	계약기간 증가 내역 (일)	계약금액 증액 내역 (원)	취합기관
총계	463	63	14	209	124,214,068	서울특별시
도시기반시설본부	62	13	4	0	123,182,500
상수도사업소 본부 및 산하 수도사업소	257	4	1	27	0
동대문소방서	1	1	1	7	0
서울특별시 강서구	88	5	5	100	0
서대문구	1	1	1	60	0
성북구	13		1	14	0
서울주택도시공사	41	39	1	1	1,031,568

ㅇ `20.7~8월

기관명	전체현장 (개)	공사중지현장 (개)	계약기간‧금액 조정 현장(개)	계약기간 증가 내역 (일)	계약금액 증액 내역 (원)	취합기관
총계	302	6	0	0	0	서울특별시
도시기반시설본부	70	3	0	0	0
상수도사업소 본부 및 산하 수도사업소	232	3	0	0	0