등록번호

토목과-13363

주무관

도로관리팀장

토목과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2020.9.23.

지풍근

김균성

김귀용

이경우

09/25

서영관

결재일자

2020.9.25.

공개구분

부분공개(5)

협  조

기획재정국장

임근래

설계변경(제3회) 검토 보고

[2020년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)]

서 대 문 구

토목과

설계변경(제3회) 검토 보고

『2020년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 홍제역 ~ 고은초간 도로정비 반영(제2회 추가경정예산)으로 계약 물량이 변경됨에 따른 설계변경(제3회) 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 토목과-11194호(2020.8.14.) : 2020년 관내 포장도로 유지보수공사 시행 계획 보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 3. 9. ~ 12.31.

○ 공 사 비 : 금1,743,128,120원

※ 도급비 1,323,938,120원, 관급비 413,801,100원, 이설비 5,388,900원

○ 공사규모

- 아스콘 포장 101a, 콘크리트 포장 13a, 빗물받이 82개소, 기타 1식

○ 도 급 자 : 의천건설 *******

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경 사유

○ 2020년 서대문구 주민참여예산 사업인 『보행자 통행로 확보(평면보행로 설치)를 취소하고 해당 구간 도로 전체 정비(홍제역 ~ 고은초)를 반영한 공종별 물량 증감

※ 제2회 추가경정예산 : 230,000천원

□ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비		1,743,128,120	1,941,512,120	230,590,990
도급비	공급가액	1,203,580,110	1,312,489,201	108,909,091
	부가세	120,358,010	131,248,919	10,890,909
	계	1,323,938,120	1,443,738,120	119,800,000
관 급 비		413,801,100	524,592,090	110,790,990
이 전 비		5,388,900	5,388,900	-

□ 주요공종 물량 현황

공 종	단 위	당 초	변 경	증․감	비 고
아스콘포장	@	101	131	30
소규모포장 복구	@	17.8	17,9	0.1
도로경계석 설치	m	2,510	2,510	-
빗물받이 설치	개소	82	105	23

Ⅳ		조치계획

○ 홍제역~고은초간 도로정비 반영에 따라 발생된 물량 증감 사항에 대하여 설계 변경을 시행하고, 향후 준공시 실 시공 물량에 따라 정산 조치코자 함

붙임  1. 설계변경 내역서(제3회) 1부.

2. 설계변경 검증 확인서 1부.  끝.