문서번호	물순환정책과-17547
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	김경남	10/05 김재겸

2020년 토양오염 실태조사 시료채취 용역 설계 변경

2020. 10.

물순환안전국

(물순환정책과)

2020년 토양오염 실태조사 시료채취 용역 설계 변경

2020년 토양오염 실태조사 시료채취 용역 중 시료채취 지점 및 굴착공수의 감소 등 과업내용 변경으로 설계변경을 시행하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 토양오염 실태조사 시료채취 용역

○ 계 약 자 : 재단법인 그린환경연구소 외 1개사

○ 계약기간 : 2020.5.18. ~ 10.30.

○ 계약금액 : 86,282,000원

○ 주요과업 : 시료채취, GPS측정, 시료채취공 원상복구 등

□ 설계변경 내용

○ 변경사유 : 폐업 등 시료채취 불가 지역 발생으로 시료채취 지점수, 굴착공수 및 시료채취수 감소

○ 주요 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감
시료채취 지점	370	339	△31
굴착공수	400	390	△10
GPS 측정	400	392	△8
지중 매설물 탐사	400	390	△10

□ 검토결과

○ 굴착공수 및 시료채취수 등 공종별 물량이 감소하였으므로 설계 변경 함이 타당함

○ 계약금액 조정

- 당초 : 86,282,000원

- 변경 : 81,510,000원

구 분	당 초	변 경	증 · 감
계	86,282,000	81,510,000	△4,772,000
토양오염실태조사 시료채취	48,351,600	47,142,810	△1,208,790
GPS측정조사 및 자료처리	21,802,400	21,366,352	△436,048
시료채취공 원상복구	5,750,260	3,056,918	△2,693,342
제경비 등 (부가세 포함)	10,377,740	9,943,920	△433,820

□ 행정사항

○ 변경된 계약내역을 계약업체에 통보하여 변경 합의

○ 설계변경 내용을 반영하여 계약변경하고, 준공 처리

○ 보건환경연구원에서 시료분석 후 초과지역은 자치구에서 행정처분

붙임  토양오염실태조사 시료채취 용역비 산출내역서(변경) 1부.  끝.