문서번호	설비부-15741
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	10/15 이달영
협조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』추진 중 유관기관(서울지방경찰청) 협의에 따라 과속·단속카메라 이설 횟수(2회→1회) 조정하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

□  공사기간 : 2019.10.25. ~ 2021.07.31

□  위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□  규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로확폭(L=582m)

□ 통신 : 라디오재방송설비, CCTV설비, 교통장비 이설

□  감리사/시공사 : 동부엔지니어링(주)/㈜한국에빅스

□ 공사금액(통신) : *******************

□ 공 정 률(통신) : 14%

2		관련근거

□ 제2자유입건 제2020-376호(`20.10.14): 과속단속장비 이설 실정보고

3		실정보고 내용

□ 과속단속 카메라 이설 횟수 조정

○ 변경내용

-당초(이설2회) : 철거→경찰청 지정장소 이설→공사완료 시점 원위치 이설

-변경(이설1회) : 철거→보관→공사완료 시점 적정 위치에 재설치

○ 사 유 : 과속단속카메라를 설치·운영하는 서울지방경찰청 협의에 따라 본            지하차도 공사에 저촉되는(지장물) 단속카메라 철거하고 공사 완료 시점에           재설치

[위치도 및 관련사진]

<철거 위치도>	<과속 단속카메라>

○ 주요변경 내역                                               (단위:천원)

공 종	변경내용	변경금액
교통관제장비 이설공사	·과속단속카메라 이설 2회→1회	*******
제경비 및 부가세		*******
도급금액		********

□ 건설사업관리자 의견

○ 과속단속 카메라 이설 관련하여 카메라 설치·운영하는 서울지방경찰청 협의에          따라 이설 횟수 조정하는 것이 타당하며, 변경 내역은 공사계약일반조건에 따라          적정하게 산출됨.

4		보고자 의견

□  건설사업관리자의 보고내용이 적정하므로 실정보고 승인하고, 공사구간에        저촉되는 과속단속카메라 철거 후 공사완료 시점에 재설치 하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.