문서번호	설비부-15959
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	10/19 이달영
협조

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」

관급자재(	통합배선반 구매) 납품기한 연기 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」

관급자재(	통합배선반 구매) 납품기한 연기 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」시행 중 통신공사 준공기한 연기에 따른 관급자재(영상감시장치 구매)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

1		관련근거

□ 관급자재 납품기한 변경 승인요청 : 동일감리 제20-253호(2020.10.06.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2019.03.27.~2020.12.30(총차 2019.03.27.~2021.07.30.)

□ 도 급 비 : 1차 250,000,000원(총차 589,611,000원)

□ 시 공 사 : ㈜세호영상 대표 박석신

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축,토문엔지니어링 건축사사무소

3		검토내용

가. 납품기한 연기 사유

□ 통신공사 공사기한 연기에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

※ 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비고
준공일자(총차)	~ 2020.09.25.	~2021.07.30.

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용 (※세부계약 내역 첨부2 참조)

번호	계약번호	품 명 (규격)	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	*************	***	*******	***********	***********	*********** *********	****

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 통신공사 준공기한 연기에 따른 공사 관급자재 납품(설치)시기 미도래

□ 책임건설사업관리기술자로부터 검토보고 된 내용이 적정하다 판단되어, 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 2021.07.30.로 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 관급자재 납품기한 변경 승인요청 문서 1부.

2. 기존계약내역(물품계약서) 1부.

3. 합의서 1부. 끝.