문서번호	설비부-16002
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	10/20 이달영
협조

「G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사」

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

「G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사」

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토보고

우리부에서 추진중인「G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사」에 대한 관급자재(영상감시장치)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

1		관련근거

□ 관급자재 납품기한 변경 승인요청 : PC G밸리 제20*******01호(2020.10.16.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2018.04.03.~2020.11.16(총차 2018.04.03.~2021.02.15.)

□ 도 급 비 : 1차 162,764,000원(총차 512,700,386원)

□ 시 공 사 : ㈜세빛전자통신 대표 이상호

□ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링,(주)무영씨엠건축사사무소

3		검토내용

가. 납품기한 연기 사유

□ 통신공사 통신기한 연기 및 선행공사 공기지연에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

※ G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사(건축공사 및 설비공사, 총차) 준공일은 2021.02.15.일 이나 현재 건축공사 중단(2020.08.24.부터)중으로 공기지연이 예상됨

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용 (※세부계약 내역 첨부2 참조)

번호	계약번호	품 명 (규격)	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	***********	******** ********************	******	***********	***********	********** ***********	****

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 통신 공사(총차) 준공기한은 2020.02.15. 이며, 2020.08.24.부터 건축공사가 공사 중단 됨에 따라 관급자재 납품(설치)시기 미도래

□ 책임건설사업관리기술자로부터 검토보고 된 내용이 적정하다 판단되어, 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 2021.06.30.로 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 관급자재 납품기한 변경 승인요청 문서 1부.

2. 기존계약내역(분할납품요구및통지) 1부.

3. 합의서 1부. 끝.