실정보고 검토서

공 사 명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m,  연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.2.1.~'22.3.31.

· 도 급 비 : 38,482백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링외

2개사

실정보고 건명

TBM터널 지보패턴 변경(4차) 실정보고

- 반포사관 제2020-384호((2020.10.15.)

실정보고

사    유

- TBM터널 굴진중 암반선이 설계와 상이하여 암판정 결과에 따라 지보패턴 변경    (P-2~4 → P-4)

- 우기철 사토장 야적장 부지 부족으로 암버력 반출이 불가하여, 유출부에    임시 적치를 위한 운반비 반영

건설사업관리자

검  토  의  견

TBM터널 암반상태가 설계와 상이하여 지보패턴 변경하여 안정성 확보 후 공사를 추진함이 적절하며, 사토장 반입불가로 인한 암버력 임시 적치에 대하여도 설계변경시 반영함이 타당

공  기  에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고(증·감)
규모	*********** ********* ************** ****************	************ ********* ************** ***************** *************	************* *********** ************** ***************** ***************
금액	***********	***********	************

예산조치

계    획

당초 도급비 범위내 시행가능( ), 당초 사업비 범위내 시행가능(○) 별도(추가) 예산 확보 필요( )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발 주 처

검토의견

건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 실정보고 사항을 승인처리하고, 추후 설계변경시 계약내역에 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

비     고

결재

담당

김재건

과장

손창익

부장

10/20

박홍봉